대전광역시 대덕구 고시 제2016 - 61호

도시계획시설사업(방재시설/소하천) 실시계획(변경) 고시

1. 대덕구 공고 제2016-264호(2016.3.18.) 및 대덕구 고시 제2016-26호(2016.4.29.)에 의거 도시계획시설사업 실시계획 고시되어 우리구에서 시행중인 「연축․상서동 재해위험지역 정비사업」에 대한 사업기간 변경을 위하여

2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제88조 도시계획시설사업 실시계획(변경)을 작성하고 같은법 제91조 및 같은법 시행령 제100조 규정에 따른 도시계획시설 사업 실시계획(변경)을 고시합니다.

3. 관계도서(도시계획통합정보서비스“http://www.upis.go.kr” 에서 고시문 열람가능)는 대전광역시 대덕구 도시과(☎042-608-5102)에 비치하고 일반인 및 이해 관계인에게 보여드립니다.

2016년    9월    30일

대 덕 구 청 장

가. 사업시행지의 위치 : 대전광역시 대덕구 상서동 136-6(변경없음)

나. 사업의 종류 및 명칭 : 연축·상서동 재해위험지역 정비사업(변경없음)

다. 면적 또는 규모(변경없음)

o 덕 암 천 : A=4,675㎡

- 하천개수 : L=290.0m

- 자연석 쌓기 : A=1,109㎡

- 호안블럭 설치 : A=1,132㎡

- 보도교 1개소

라. 시행자의 성명 및 주소(변경없음)

o 명  칭 : 대전광역시 대덕구청장

o 주  소 : 대전광역시 대덕구 대전로 1033번길 20

마. 사업의 착수예정일 및 준공예정일(변경)

o 당초 : 2016. 03. 18. ~ 2016. 09. 17.

o 변경 : 2016. 03. 18. ~ 2016. 12. 31.

바. 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지·지번 ·지번 지목 및 면적, 소유권과 소유권외의 권리의 명세 및 그 소유자·권리자의 성명·주소 : 변경없음

사. 제99조의 규정에 의한 공공시설 등의 귀속 및 양도에 관한 사항 : 변경없음

아. 관계도서 : 게재생략.   끝.