대전광역시 공고 제2019-1173호

대전산업단지 재생사업관련 건설공사 재착공 공고

노후된 산업단지 기능고도화 및 입지여건 개선을 위해 추진하고 있는 대전산업단지재생사업과 관련 대전산업단지 재생사업지구 기반시설(도로) 건설공사의 일시정지가 해제됨에 따라 「환경영향평가법」 제37조 및 같은법 시행령 제55조의4 규정에 따라 아래와 같이 사업착공 등의 내용을 공개합니다.

2019년   7월   1일

대 전 광 역 시 장

1. 공 사 명 : 대전산업단지 재생사업지구 기반시설(도로) 건설공사

2. 위    치 : 대전광역시 대덕구 대화동, 읍내동 일원(대전산업단지)

3. 면    적 : 2,312,847㎡

4. 공사기간(정지2018.12.13. / 해제 2019.07.01.)

․ 당초 2017.01.03. ~ 2021.11.18. ⇒ 변경 2017.01.03. ~ 2022.06.06.

5. 재착공 사유 : 일부보상 및 지중 지장물 이설 등 공사추진 여건 조성

※ 대전산업단지 서측 진입도로 건설공사는 정지 없이 추진 중