평촌공업지역 스마트플랫폼 신축공사

전기 감리용역 과업지시서

2023. 7.

재단법인 대덕경제재단

-  목    차  -

	Ⅰ. 과업의 개요 -------------------- 1
	Ⅱ. 일반사항 및 감리업무 ------------ 2
	Ⅲ. 보고 및 기록관리 ---------------- 4

Ⅰ		과업의 개요

1. 과업의 명칭 : 평촌공업지역 스마트플랫폼 신축공사 전기 감리용역

2. 과업의 목적

: 본 과업은 「전력기술관리법」제12조 규정에 따라 공사의 완벽한 시공을 위하여 공사감리를 수행하도록 하는 데 있다.

3. 과업수행의 기본 개요

가. 과업 대상

1) 공 사 명: 평촌공업지역 스마트플랫폼 신축공사(전기)

2) 공사개요

가) 위    치: 대전광역시 대덕구 평촌동 142-1번지

나) 공사내용: 전기공사 1식

다) 건물규모: 신축[2개동, 1,031.1㎡, 공장/ (1동)지상2층 955.8㎡, (2동)지하1층 75.3㎡]

라) 공사기간: 착공일로부터 6개월

나. 과업 개요

1) 과업기간

가) 본 용역의 수행기간은 착수일로부터 7개월(또는 과업 대상공사 준공일까지)로 한다.
(단, 공사기간이 연장되는 경우 본 용역기간도 연장되며, 감리용역비의 변경 없이 감리기간을 연장한다.)

나) 감리기간 중 다음과 같은 사유 발생 시 감리기간을 변경할 수 있다.

(1) 천재지변 등 불가항력으로 인해 사실상 감리업무 수행이 불가능 할 경우

(2) 발주청의 계획 변경 등 기간 내 감리업무 수행이 불가능 할 경우

(3) 기타 발주청이 인정할 수 있는 사유가 발생하였을 경우

다) 과업 대상 공사가 천재지변, 설계변경, 기타 사유로 준공기한이 연장되었을 때에는 감리용역비의 변경 없이 감리기간을 연장한다.

2) 과업범위

가) 전기공사

나) 관급자재 수불(관급자 설치분 포함) 및 품질관리

다) 기타(관계 법령 및 규정)

* 과업 대상 공사의 전기분야에 대한 전반적인 사항을 포함한다.(단, 별도 감리자가 지정된 공사 제외)

3) 감리원 배치 등

가) 감리자의 배치기준

구 분	등 급	배치인원	배치기간	비 고
상 주	중급 이상	1	7개월
비 상 주	고급 이상	1	7개월

나) 감리자가 공사감리 중 부득이한 사유로 업무를 계속할 수 없는 경우에는 사전에 발주자의 승인을 받아야 하며, 후임자는 전임자와 동등 이상의 자이어야 한다.

Ⅱ		일반사항 및 감리업무

1. 감리원의 업무자세

가. 감리원은 법률과 이에 따른 명령, 공공복리 및 계약조항과 어긋나는 어떠한 행위도 하지 아니하며 신의와 성실로서 업무에 임한다.

나. 감리원은 감리업무를 수행함에 있어서 당해 공사의 설계도서, 계약서, 기타 관계서류 등의 내용을 숙지하고 당해 공사의 특수성을 파악한 후 감리에 임해야 한다.

다. 감리원은 공사현장의 문제점이 발생되거나 시공과 관련된 중요사항에 대하여는 독단적인 판단과 처리보다는 수시로 감독관과 협의하여 필요한 자문을 제공하여야 한다.

라. 감리원은 감리원으로서의 품위를 손상하는 행위를 하여서는 안된다.

마. 감리원은 담당업무와 관련하여 제3자로부터 일체의 금품, 이권 또는 향응을 받아서는 안된다.

바. 감리원은 감리업무를 수행함에 있어서 공무원법상의 성실의 의무, 친절공정의 의무, 기밀엄수의 의무, 청렴결백의 의무 등에 대하여 공무원에 준하여 책임을 진다.

사. 감리원은 해당 공사의 품질향상을 위하여 노력한다.

2. 감리원의 주요업무 [전력기술관리법시행령 제23조〕

가. 공사계획의 검토

나. 공정표의 검토

다. 발주자·공사업자 및 제조자가 작성한 시공 설계도서의 검토·확인

라. 공사가 설계도서의 내용에 적합하게 행하여지고 있는지에 대한 확인

마. 전력시설물의 규격에 관한 검토·확인

바. 사용자재의 규격 및 적합성에 관한 검토·확인

사. 전력시설물의 자재 등에 대한 시험성과에 대한 검토·확인

아. 재해예방대책 및 안전관리의 확인

자. 설계변경 등에 관한 사항의 검토·확인(기술검토의견서* 제출 必)

차. 공사진척 부분에 대한 조사 및 검사

카. 준공도서의 검토 및 준공검사

타. 설계도서와 시공도면의 내용이 현장조건에 적합한지 여부와 시공 가능성 등에 관한 사전검토

파. 기타 공사의 질적 향상을 위하여 필요한 사항으로서 지식경제부령이 정하는 사항

* 기술검토의견서

감리원은 시공 중 발생되는 기술적 문제점, 설계변경사항, 공사계획 및 공법 변경문제, 설계도면과 시방서 상호간의 차이 및 모순 등의 문제점, 기타 시공자가 시공 중 당면하는 문제점 및 발주부서에서 해당 공사의 기술검토를 요청한 사항에 대하여 현지실정을 충분히 조사, 검토, 분석하여 시공자가 공사를 원활히 수행할 수 있는 해결 방안을 제시하여야 한다. 또한, 중요한 기술검토는 반드시 서면으로 기술 검토서를 작성, 제출하여야 하고 기술 검토서에는 상세 기술검토 내역 또는 근거가 첨부되어야 한다.

3. 감리원의 근무지침

가. 감리원은 시공자의 업무와 책임을 면제시킬 수 없으며 임의로 설계를 변경시키거나 기일연장 등 공사계약조건과 다른 지시나 결정을 하여서는 안된다. 다만, 인명손실이나 시설물의 안전에 위험이 예상되는 사태가 발생할 시에는 적절한 조치를 취한 후, 즉시 발주자에 보고하여야 한다.

다. 감리원은 공사현장에 문제가 발생하거나 시공과 관련한 중요한 사항, 예산과 관련된 사항에 대하여는 수시로 서면으로 실정보고하여 발주자의 승인을 득하고 필요한 조치를 취하여야 한다.

라. 감리원은 공사 시행 중은 물론 공사가 종료된 후라도 발주자, 감사기관 등의 수감요구가 있을 경우에는 이에 응하여야 한다.

마. 감리원은 민원발생 요소를 사전에 예방하여 공정에 차질이 없도록 적극 조치하여야 한다.

4. 감리원 지도·감독

가. 감독관은 감리원을 지도·감독하며 정기 및 수시로 임무를 부여할 수 있고 그 내용을 보고하게 할 수 있다.

나. 감독관은 감리원이 지시를 위반한다고 인정되는 경우 이에 대하여 해명하도록 하거나 시정토록 지시할 수 있다.

다. 감리원이 시공자에게 지시한 사항에 대해 시공자로부터 이의가 있는 때에는 그 내용을 조사하여 감리원의 지시사항을 확인, 변경, 조정할 수 있다.

라. 발주자는 과업 상 감리와 관련된 용역의 범위 밖에서도 감리원의 자문을 구하거나 감리원으로 하여금 제3자의 전문가에게 자문을 받아 이를 보고하게 할 수 있다.

마. 발주자는 감리원의 불성실한 근무자세, 고의 또는 중대한 과실로 감리업무를 더 이상 수행할 수 없다고 판단할 때에는 제재를 가할 수 있다.

사. 감리원의 자질이 부족하거나 감리원으로서의 품위손상 및 업무상 습득한 기밀을 준수하지 않을 경우 교체를 요구할 수 있으며 이 경우 감리원은 교체요구에 응하여야 한다.

Ⅲ		보고 및 기록관리

1. 감리보고

※ 관계법령 상 지정서식이 있는 경우에는 해당 서식을 사용하여야 한다.

가. 착수보고

1) 제출시기 : 계약일로부터 7일 이내

2) 제출서류

가) 감리업무 수행계획서

나) 감리원 지정신고서 및 경력확인서

나. 공정보고

1) 정기보고

가) 제출시기 : 매월(익월 10일 이내), 매 분기별

나) 제출서류

(1) 실시공정표

(2) 감리업무 수행사항

(3) 품질검사 및 관리현황

(4) 주요자재 검사 및 수불내용

(5) 설계변경사항

(6) 공사현황사진

(7) 기타 필요하다고 인정하는 사항

※ 분기 보고서는 월간 보고서를 취합하여 제출하고, 월간 및 분기 보고서 제출은 감독관과 협의하여 방법을 조정할 수 있다.

2) 수시보고

가) 제출시기 : 발주자가 별도 지시할 경우 즉시

나) 제출서류 : 감리수시보고서

다. 완료보고

1) 제출시기 : 공사 준공검사 후 7일 이내

2) 제출서류

가) 공사감리 완료계

나) 공사감리조서 및 감리일지

다) 공사감리 반입자재 검수 및 시공검측서

라) 공사현황 사진

마) 기타 각종 증빙 자료

2. 기록관리․유지

가. 감리원은 매립되는 공사나 외부에서 확인하기 곤란한 부분의 시공에는 반드시 입회하여 상세한 기록 및 사진촬영 등의 방법으로 시공내용을 명확히 입증할 수 있는 자료를 작성·비치하여야 한다.

나. 공사현장 시공과정 사진은 공정별, 공사추진 단계별로 촬영·정리하여 감리원 및 시공자가 보관한다.

3. 위법보고

감리원은 당해 공사감리를 함에 있어 관계법령에 따른 명령이나 처분 기타 위반된 사항을 발견하거나 시공자가 설계도서대로 공사를 하지 않는 경우에는 이를 발주자에게 즉시 보고한 후 지시를 받아 처리한다.

4. 기  타

가. 계약을 구성하는 모든 문서는 상호 보완관계를 가지나 상호모순이나 오류가 있을 경우 계약조건에 명시된 우선 순위에 따라 해석하며 해석상의 차이가 있는 경우에는 발주자의 해석을 우선한다.

나. 보고 및 자료제출은 발주자에게 접수한 날로부터 효력이 발생한다.

다. 감리기간 중 관련법령이 개정될 경우에는 개정된 법률에 따라 감리업무를 수행한다.

라. 발주자는 아래 사유가 발생하였을 경우에는 본 감리용역을 해약 또는 관계법에 의한 조치 등을 할 수 있다

1) 감리이행이 불가능하다고 인정된 때

2) 지시에 불응하여 감리를 진행할 경우

3) 계약조건을 위반한 때

4) 감리수행 시 불성실 또는 중대한 과오로 인하여 본 사업시행에 막대한 재산 및 인명피해가 발생한 경우

마. 감리원은 공사가 준공되고 감리기간이 종료되었다 하더라도 감리업무 등이 마무리될 때까지 감리업무를 계속하여야 하며, 장비 시운전 및 합동하자 점검 시 입회·확인하여야 한다. 이로 인한 추가 감리비는 지급하지 아니한다.

바. 본 공사의 품질 등에 대하여 감리원 귀책사유인 경우 회계 상의 책임을 진다.

사. 감리원이 감리를 함에 있어 고의 또는 과실로 발주자에 재산상 손해를 발생하게 한 경우에는 당해 감리원이 속하는 사무소가 이를 배상하여야 한다.

아. 모든 설계도서 및 기타자료를 다른 목적에 이용하여서는 안되며, 업무상 취득한 사실을 누설하여서는 안된다.

자. 기타 본 과업지시서에 명시되지 않은 일반사항 사항에 대하여는 감리업무와 관련한 사항은 전력기술관리법, 전기공사업법 등을 우선하여 따르고, 계약업무와 관련한 사항은 계약 관련 법령을 우선하여 따른다.