정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	중리근린공원 하부 공영주차장 조성 사업
② 추진배경	주변지역 주차난으로 인한 주민불편 해소
③ 사업개요	주차장명 : 중리근린공원 하부 공영주차장 위 치 : 대덕구 중리동 388-17 면적(면수) : 902㎡ (22면) 사 업 비 : 1,738백만원
④ 사업부서	교통과		⑤ 담당자	시설8급 김주회 (부서장:박중규)
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간	2020.4.~2022.12.
<그간 주요 추진내용>
○ 추진계획 변경 수립		‘20.03.17.	김광신 주무관 이근경 주무관 최종대 사무관 길금돈 서기관 한필중 부구청장 박정현 구청장
○ 실시설계용역 계약의뢰 및 집행품의		‘20.04.07.	김광신 주무관 이근경 주무관 최종대 사무관 길금돈 서기관 한필중 부구청장
○ 실시설계용역 착수		‘20.05.07.	김광신 주무관 이근경 주무관 최종대 사무관
○ 실시설계용역 착수 보고		‘20.05.19.	김광신 주무관 이근경 주무관 최종대 사무관
○ 실시설계용역 준공		‘20.12.28.	최승규 주무관 이근경 주무관 최종대 사무관
○ 도시계획시설사업 실시계획 인가 및 공원점용허가		‘21.03.16.	안강식 주무관 서성원 주무관 송인한 사무관
○ 사업비 부족에 따른 추진계획 변경 방침		‘21.03.31.	최승규 주무관 이근경 주무관 최종대 사무관
○ 공사 계약심사 및 일상감사		‘21.04.07.	안강식 주무관 서성원 주무관 송인한 사무관 길금돈 서기관 강규창 부구청장 박정현 구청장
○ 공사(토목) 착공		‘21.05.10.	안강식 주무관
○ 특별조정교부금 예산 확보		‘21.06.09.	안강식 주무관 서성원 주무관 송인한 사무관
○ 1차 실정보고 승인		‘21.07.08.	안강식 주무관 이학로 주무관 송인한 사무관
○ 2차 실정보고 승인 및 1차 설계변경		‘21.09.09.	안강식 주무관 이학로 주무관 송인한 사무관 이근수 서기관 강규창 부구청장
○ 2차 설계변경		‘21.11.01.	안강식 주무관 이학로 주무관 송인한 사무관
○ 공사(토목) 준공		‘21.11.05.	안강식 주무관
○ 공사(건축) 착공		‘21.12.17.	안강식 주무관
○ 공사(조경, 소방) 착공		‘21.12.29.	안강식 주무관
○ 공사(조경, 소방) 일시정지		‘22.02.15.	김주회 주무관
○ 공사(건축) 준공		‘22.04.04.	김주회 주무관