정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역

① 정책사업명	중리미래 공영주차장 입체화사업
② 추진배경	주변지역 주차난으로 인한 주민불편 해소
③ 사업개요	- 주차장명 : 중리미래 공영주차장 - 위 치 : 대덕구 중리동 363-23 - 규 모 : 지상1층~지상2층, 3단(주차 약 100명) - 사 업 비 : 3,000백만원(시비 50%, 구비50%)
④ 사업부서	교통과		⑤ 담당자	시설7급 안강식 (부서장: 오재룡)
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간	2023.1.~2026.12.
<그간 주요 추진내용>
○ 중리1지구 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 용역 계약의뢰		‘23.05.23.	박재범 교통과장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관
○ 중리1지구 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 용역 집행품의		‘23.05.22.	강동구 경제환경국장 정영주 총무과장 송순미 경리팀장 박재범 교통과장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관
○ 중리미래 공영주차장 입체화사업 문제점 및 대책 추진계획 보고		‘23.05.16.	최충규 구청장 이동한 부구청장 강동구 경제환경국장 박재범 교통과장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관
○ 중리미래 공영주차장 입체화사업 기본 및 실시설계용역 사전규격 공개 의견에 대한 검토결과 회신		‘23.03.30.	박재범 교통과장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관
○ 중리미래 공영주차장 입체화사업 기본 및 실시설계용역 계약의뢰		‘23.03.21.	박재범 교통과장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관
○ 계약심사 재의뢰(중리미래 공영주차장 입체화사업 기본 및 실시설계 용역)		‘23.02.17.	박재범 교통과장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관
○ 일상감사 재의뢰(중리미래 공영주차장 입체화사업 기본 및 실시설계 용역)		‘23.02.17.	박재범 교통과장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관
○ 중리미래 공영주차장 입체화사업 기본 및 실시설계 용역 외 1건 발주 계획보고		‘23.02.16.	최충규 구청장 이동한 부구청장 강동구 경제환경국장 박재범 교통과장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관
○ 계약심사 의뢰(중리미래 공영주차장 입체화사업 기본 및 실시설계 용역)		‘23.02.07.	박재범 교통과장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관
○ 일상감사 의뢰(중리미래 공영주차장 입체화사업 기본 및 실시설계 용역)		‘23.02.07.	박재범 교통과장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관