정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역

① 정책사업명	대덕구 신청사 건립
② 추진배경	❍ 현 청사 노후, 시설 부족 및 행정수요 증가에 따른 이용 불편 ❍ 대덕구 2030 중장기 발전계획 연축지구 행정타운 조성계획과 연계한 연축생활권 지역으로 청사 이전 필요
③ 사업개요	❍ 위 치 : 연축동 241번지 일원 (대전연축 도시개발사업지 내 공공청사부지) ❍ 규 모 : 연면적 35,684㎡, 지하2/지상9층 - 3동(본청, 의회, 보건소) ❍ 총사업비 : 청사건립기금 등 1,200억원
④ 사업부서	공공청사과		⑤ 담당자		시설7급 이문용 (부서장: 조성운)
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간		2020. ~ 2026.
<그간 주요 추진내용>
❍ 기본설계 및 건설사업관리 용역 일시정지 해제		‘23. 06. 09.		지인권 국장 조성운 과장 김문선 팀장 이문용 주무관
❍ 대전 연축 도시개발사업 실시계획 인가 신청 알림		‘23. 06. 02.		지인권 국장 조성운 과장 김문선 팀장 이문용 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 기술자문단 구성‧운영 계획 수립		‘23. 05. 23.		최충규 구청장 이동한 부구청장 지인권 국장 조성운 과장 김문선 팀장 박연수 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 건설사업관리용역 일시정지 통보		‘23. 03. 17.		조성운 과장 김문선 팀장 이문용 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 건설사업관리용역 계약 체결		‘23. 03. 15.		지인권 국장 조성운 과장 김문선 팀장 이문용 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 기본설계용역 일시정지 통보		‘23. 03. 09.		조성운 과장 김문선 팀장 이문용 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 건설사업관리용역 낙찰자 선정 ✓ 01. 19. PQ심사, 01. 30. TP심사		‘23. 02. 15.		조성운 과장 김문선 팀장 이문용 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 건설사업관리용역 사업수행능력, 기술제안서 평가위원회 개최		‘23. 01. 19.		조성운 과장 김문선 팀장 김하정 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 기본설계 착수보고회 결과 보고		‘23. 01. 17.		지인권 국장 조성운 과장 김문선 팀장 심세라 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 기본설계 용역 계약 및 착수		‘22. 12. 21.		지인권 국장 주대식 과장 김문선 팀장 심세라 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 기본설계 설계공모 심사위원회 개최 및 당선작 선정		‘22. 11. 16.		주대식 과장 김봉찬 팀장(대결) 김문선 팀장 심세라 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 건설사업관리용역 건설기술심의 (市 건설기술심의위원회)		‘22. 11. 15.		주대식 과장 김문선 팀장 심세라 주무관 김하정 주무관 ※ (관련) 市 정책기획관
❍ 대덕구 신청사 건립 공유재산 취득 추진계획 성립		‘22. 10. 11.		최충규 구청장 이동한 부구청장 지인권 국장 설재균 실장 서동훈 팀장 주대식 과장 김문선 팀장 김하정 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 건설사업 관리용역 추진계획		‘22. 09. 22.		지인권 국장 최인신 과장 김문선 팀장 김하정 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 설계공모 공고		‘22. 07. 22.		지인권 국장 최인신 과장 김문선 팀장 심세라 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 일상감사 및 계약심사 결과 통보		‘22. 06. 21.		최인신 과장 김문선 팀장 심세라 주무관 ※ (관련) 區 감사실
❍ 대덕구 신청사 건립 설계공모 추진계획		‘22. 06. 09.		박승원 국장(대결) 지인권 국장 최인신 과장 김문선 팀장 심세라 주무관
❍ 2022년 제3회 건축전문위원회 심의결과 알림 ✓ 공공건축 심의 원안의결		‘22. 06. 08.		최인신 과장 김문선 팀장 심세라 주무관 ※ (관련) 區 주택정책과
❍ 2022년 제5회 건설기술심의위원회 소위원회 개최결과 알림 ✓ 대형공사 입찰방법 심의 원안의결		‘22. 06. 02.		최인신 과장 김문선 팀장 김하정 주무관 ※ (관련) 市 정책기획관
❍ 대덕구 신청사 건립 관련 대형공사 입찰 및 낙찰자 결정방법 검토보고		‘22. 03. 25.		강규창 부구청장 지인권 국장 최인신 과장 김문선 팀장 김하정 주무관
❍ 2022년 제2회 지방재정계획심의위원회 투자심사 결과 통보 ✓ 투자심사 조건부 승인		‘22. 03. 02.		최인신 과장 김문선 팀장 심세라 주무관 ※ 박정현 청장님 업무보고
❍ 대덕구 신청사 건립 사업계획 적정성 검토 용역 완료 보고		‘21. 09. 29.		박정현 구청장 강규창 부구청장 지인권 국장 최인신 과장 이동준 팀장 심세라 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 타당성 조사 및 기본계획 용역 완료보고회 결과 보고		‘20. 12. 09.		길금돈 국장 주대식 과장 최인신 팀장 황영선 주무관