정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역

① 정책사업명	신탄진 창업실습공간 조성공사
② 추진배경	·도시재생사업 지속 추진으로 상권 내 창업이 활성화 되어 공점포 감소하는 상황 ·수요조사 결과 특정점포 개별입주 대비‘공유형 창업실습공간’에 대한 수요가 더 높은 것으로 나타남
③ 사업개요	○ 위 치 : 대덕구 신탄진동 142-10번지 ○ 사 업 비 : 2,245백만원 / 공사 1,735, 감리 26, 보상 428, 설계 등 56 ○ 주요내용 : 신축 / 지상3층, 근린생활시설 및 업무시설 406.08㎡
④ 사업부서	도시활력과		⑤ 담당자	시설8급 이주영 (부서장: 이명구)
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간	2018. ~ 2023.
<그간 주요 추진내용>
○‘18. 9. 7. : 신탄진 도시재생 뉴딜사업 활성화계획 고시 - 창업실습공간조성 : 공점포(중앙연립상가) 40개소 장기임대(10년) / 8억원 ○‘20. 2. : 중앙연립상가 가로주택정비사업 진행으로 사업내용 변경 - 창업실습공간조성 : 건물신축(연면적 406.08㎡, 지상3층) / 14억원 ○‘20. 10. : 활성화계획 변경 관련 국토부 사전 협의 ○‘21. 3. : 기본 및 실시설계 용역 착수, 주민의견수렴(3회) ○ `21. 12. : 신탄진 도시재생 뉴딜사업 제2차 활성화계획(변경) 승인 ○ `22. 7. : 건축설계 완료, 공사 및 용역 발주, BF 예비인증 접수 ○ `22. 8. : 공사(건축, 기계, 전기, 소방, 통신) 및 감리용역(건축) 착수 * 8. 26. : 공사 및 감리용역(건축) 일시정지(BF예비인증 심사일정 반영) ○ `22. 10. : 감리용역(전기, 소방) 착수 * 10. 17. : 감리용역 일시정지(BF예비인증 심사일정 반영) ○ `23. 3. : BF예비인증 승인(3.27.) * 3. 30. : 공사(건축) 및 감리감리용역(건축) 일시정지 해제 ○ `23. 4. : 실시설계 검토(BF인증 관련, 건축시공사) / 건축공사 2차분 발주
○ 대전광역시 대덕구 신탄진동 도시재생활성화계획 변경(3차) 고시		‘22. 6.21	이명구 도시재생사업단장 김택정 재생소통팀장