정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	대덕구 가족센터 조성
② 추진배경	가족의 유형별로 이원화(건강가정기본법 및 다문화 가족지원법)되어 있는 가족 지원 서비스를 통합하여 포괄적으로 지원
③ 사업개요	위 치: 대덕구 신탄진동 100-6 규 모: 지상 1층 / 연면적 647.01㎡, 전용면적 468.98㎡ -1층 가족센터(가족친화과), 2층 청소년상담(복지정책과) 사업기간: 2023. 08. ~ 2024. 08 사업예산: 총 470백만원 / 특별조정교부금 370백만원, 구 100백만원 주요시설: 사무실, 상담실, 교육실, 교류·소통 공간 등
④ 사업부서	가족친화과		⑤ 담당자	최유리
⑥ 선정기준	주요 정책사업		⑦ 사업기간	2023 ~ 2024
<그간 주요 추진내용>
`20. 07. ~ `23. 7. 활용용도 확정, 계획설계 및 실시설계 ※ ㈜동일스위트에서 연면적 13백㎡ 규모 공공청사 건립 기부채납(주차장,조경포함) `23. 04. 2024년 가족센터운영 신규 설치 수요조사 여가부 제출 ※ 2023.9.15. 2024년 가족센터 운영 국고보조금 가내시 여가부 통보 `23. 04. ~ 05. 市 특별조정교부금 신청 및 확보(370백만원) `23. 08. 29. 대덕구 가족센터 설치 및 운영 조례(안) 수립 `23. 08. 30. 건축 착공신고 완료 `23. 09. 12. 대덕구 가족센터 설치 및 운영 계획 수립 `23. 11. 06. 대덕구 가족센터 운영 민간위탁 동의(안) 수립 `23. 11. 21. 대덕구의회 제2차 정례회 본회의(동의안, 조례안) 의결 `23. 12. 01. 대덕구가족센터 인테리어 실시설계 착수 / 24년 02월 완료 `23. 12. 26. 前 다문화가족지원센터에서 대덕구 가족센터로 전환하는 위‧수탁 협약 `24. 04. 12. 대덕구 일상감사 완료 `24. 05. 30. 인테리어 공사(건축, 기계, 전기) 착공 / 통신공사 6. 20. 착공 `24. 07. 17. 가족센터 운영을 위한 물품 구입 의뢰 `24. 07. 31. 가족센터 이사 / 前 신탄진로 63(연축동) → 後 대청로 45(신탄진동) `24. 08. 현재 : 인테리어 준공 및 물품 구입 완료 예정
대전광역시 대덕구 가족센터 설치 및 운영 조례(안) 제정 계획		‘23.08.30	이동한 부구청장 정인 국장 장윤희 팀장 최유리 주무관
내 일상이 즐거운 대덕구 가족센터 설치 및 운영 계획		‘23.09.14	최충규 구청장 이동한 부구청장 정 인 국장 장윤희 팀장 최유리 주무관
대덕구가족센터 인테리어공사 집행 및 발주계획(안)		‘24.04.16	이동한 부구청장 정 인 국장 공태자 과장 장윤희 팀장 최유리 주무관