정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	중리미래 공영주차장 입체화사업
② 추진배경	주변지역 주차난으로 인한 주민불편 해소
③ 사업개요	주차장명 : 중리미래 공영주차장 위 치 : 대덕구 중리동 363-23 규 모 : 지상1층~지상2층 3단(주차 약 100명) 사 업 비 : 4,300백만원(시비 1,500, 구비2,800)
④ 사업부서	대덕구 교통과		⑤ 담당자	시설7급 장호용 교통과장 변병락
⑥ 선정기준	대규모예산		⑦ 사업기간	2023.1.~2025.12.
<그간 주요 추진내용>
○ 일상감사 의뢰(중리미래 공영주차장 입체화사업 기본 및 실시설계 용역)		‘23.02.07.	박재범 교통과장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관
○ 계약심사 의뢰(중리미래 공영주차장 입체화사업 기본 및 실시설계 용역)		‘23.02.07.	박재범 교통과장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관
○ 중리미래 공영주차장 입체화사업 기본 및 실시설계 용역 외 1건 발주 계획보고		‘23.02.16.	최충규 구청장 이동한 부구청장 강동구 경제환경국장 박재범 교통과장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관
○ 일상감사 재의뢰(중리미래 공영주차장 입체화사업 기본 및 실시설계 용역)		‘23.02.17.	박재범 교통과장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관
○ 계약심사 재의뢰(중리미래 공영주차장 입체화사업 기본 및 실시설계 용역)		‘23.02.17.	박재범 교통과장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관
○ 중리미래 공영주차장 입체화사업 기본 및 실시설계용역 집행품의		‘23.03.16.	이동한 부구청장 이근수 행정안전국장 강동구 경제환경국장 정영주 총무과장 송순미 경리팀장 박재범 교통과장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관
○ 중리미래 공영주차장 입체화사업 기본 및 실시설계용역 계약의뢰		‘23.03.21.	박재범 교통과장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관
○ 중리미래 공영주차장 입체화사업 기본 및 실시설계용역 사전규격 공개 의견에 대한 검토결과 회신		‘23.03.30.	박재범 교통과장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관
○ 중리미래 공영주차장 입체화사업 문제점 및 대책 추진계획 보고		‘23.05.16.	최충규 구청장 이동한 부구청장 강동구 경제환경국장 박재범 교통과장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관
○ 중리1지구 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 용역 집행품의		‘23.05.22.	강동구 경제환경국장 정영주 총무과장 송순미 경리팀장 박재범 교통과장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관
○ 중리1지구 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 용역 계약의뢰		‘23.05.23.	박재범 교통과장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관
○ 중리1지구 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 용역 착수		‘23.06.07.	박재범 교통과장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관
○ 경관 심의 결과 알림 (원안가결)		‘23.10.10.	오재룡 교통과장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관
○ 사업비 변경 계획 수립		‘23.11.06.	최충규 구청장 이동한 부구청장 강동구 경제환경국장 오재룡 교통과장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관
○ 특정공법 선정 위원회 개최 및 공법 선정		‘23.11.29.	강동구 경제환경국장 이병열 교통행정팀장 김관수 주차시설팀장 안강식 주무관
○ 市 도시계획·건축공동위원회 심의결과 알림(원안수용)		‘24.02.29.	오재룡 교통과장 김관수 주차시설팀장 정희찬 주무관
○ 중리1지구 지구단위계획 결정(변경) 고시 / 市 고시 제2024-67호		‘24.03.12.	오재룡 교통과장 김관수 주차시설팀장 정희찬 주무관
○ 중리1지구 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 용역 완료		‘24.03.26.	오재룡 교통과장 김관수 주차시설팀장 정희찬 주무관
○ 건축인허가 수리 및 도시계획시설 실시계획인가 고시 / 區 고시 제2024-45호		‘24.04.12.	오재룡 교통과장 김관수 주차시설팀장 정희찬 주무관
○ 市 계약심사 및 區 일상감사 완료		‘24.05.27.~06.03.	오재룡 교통과장 김관수 주차시설팀장 정희찬 주무관
○ 중리미래 공영주차장 입체화사업 기본 및 실시설계용역 완료		‘24.06.24.	오재룡 교통과장 김관수 주차시설팀장 정희찬 주무관
○ 중리미래 공영주차장 입체화공사(건축·기계, 전기, 소방, 통신) 및 용역 계약의뢰		‘24.06.21.~ 06.25.	오재룡 교통과장 김관수 주차시설팀장 정희찬 주무관