정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	중리동 도시재생 신규사업 발굴
② 추진배경	편의시설 부족 및 주택 노후화로 쇠퇴 중인 도시지역에 정주환경‧도시경관 개선, 골목 활성화 등으로 도시 활력 회복
③ 사업개요	위 치 : 중리동 164-5번지 일원 / 60,946㎡ 사 업 비 : 108.53억원(국비 50억, 시비 35억, 구비 23.53억) 주요내용 - 구유지를 활용한 생활 편의시설 공급 - 노후주택 외관정비, 골목길·도로 등 경관개선
④ 사업부서	도시계획과		⑤ 담당자	행정7급 김진태 (시설5급 곽효상)
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간	2025. ~ 2028.
<그간 주요 추진내용>
○ ‘22. 4. : 중리동 일원 도시재생 활성화계획 수립용역 발주 ○ ‘22. 8.~‘23. 3. : 국토부 사전컨설팅, 지역기업·대학과 지속 업무 협의 ○ ‘23. 4. : 지역특화재생형 활성화계획(안) 수립 ○ ‘23. 5. : HUG·전문교수 자문, 市 협의 ⇒ 유형 변경 검토 ○ ‘23. 6. : 우리동네살리기 유형으로 변경 추진 ○ ‘23. 12. : 실행계획(안) 수립, HUG·전문교수 자문, 행정협의회 개최 ○ ‘24. 2.~ 3. : 공청회, 區의회 의견청취, 국토부·HUG 사전컨설팅 ○ ‘24. 4. 17. : 2024년 상반기 국토부 도시재생 공모사업 신청 ○ ‘24. 5.~ 6. : 중앙평가(서면·현장실사·발표평가), 결과발표 / 미선정
○ 중리동 도시재생사업 (우리동네살리기) 실행계획 수립 및 공모 추진 계획		‘24.04.05.	최충규 구청장 이성규 부구청장 지인권 도시건설국장 설재균 기획홍보실장(협조) 서동훈 예산팀장(협조) 곽효상 도시계획과장 최길용 재생사업팀장 김진태 주무관