정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	대덕구 신청사 건립
② 추진배경	❍ 현 청사 노후, 시설 부족 및 행정수요 증가에 따른 이용 불편 ❍ 대덕구 2030 중장기 발전계획 연축지구 행정타운 조성계획과 연계한 연축생활권 지역으로 청사 이전 필요
③ 사업개요	❍ 위 치 : 연축동 241번지 일원 (대전연축 도시개발사업지 내 공공청사부지) ❍ 규 모 : 연면적 48,810㎡, 지하2/지상9층 - 3동(본청, 의회, 보건소) ❍ 총사업비 : 1,598억원
④ 사업부서	공공청사과		⑤ 담당자		시설7급 이문용 시설5급 조성운
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간		2020. ~ 2027.
<그간 주요 추진내용>
❍ 대덕구 신청사 건립 타당성 조사 및 기본계획 용역 완료보고회 결과 보고		‘20. 12. 09.		길금돈 국장 주대식 과장 최인신 팀장 황영선 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 사업계획 적정성 검토 용역 완료 보고		‘21. 09. 29.		박정현 구청장 강규창 부구청장 지인권 국장 최인신 과장 이동준 팀장 심세라 주무관
❍ 2022년 제2회 지방재정계획심의위원회 투자심사 결과 통보 ✓ 투자심사 조건부 승인		‘22. 03. 02.		최인신 과장 김문선 팀장 심세라 주무관 ※ 박정현 청장님 업무보고
❍ 대덕구 신청사 건립 관련 대형공사 입찰 및 낙찰자 결정방법 검토보고		‘22. 03. 25.		강규창 부구청장 지인권 국장 최인신 과장 김문선 팀장 김하정 주무관
❍ 2022년 제5회 건설기술심의위원회 소위원회 개최결과 알림 ✓ 대형공사 입찰방법 심의 원안의결		‘22. 06. 02.		최인신 과장 김문선 팀장 김하정 주무관 ※ (관련) 市 정책기획관
❍ 2022년 제3회 건축전문위원회 심의결과 알림 ✓ 공공건축 심의 원안의결		‘22. 06. 08.		최인신 과장 김문선 팀장 심세라 주무관 ※ (관련) 區 주택정책과
❍ 대덕구 신청사 건립 설계공모 추진계획		‘22. 06. 09.		박승원 국장(대결) 지인권 국장 최인신 과장 김문선 팀장 심세라 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 일상감사 및 계약심사 결과 통보		‘22. 06. 21.		최인신 과장 김문선 팀장 심세라 주무관 ※ (관련) 區 감사실
❍ 대덕구 신청사 건립 설계공모 공고		‘22. 07. 22.		지인권 국장 최인신 과장 김문선 팀장 심세라 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 건설사업 관리용역 추진계획		‘22. 09. 22.		지인권 국장 최인신 과장 김문선 팀장 김하정 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 공유재산 취득 추진계획 성립		‘22. 10. 11.		최충규 구청장 이동한 부구청장 지인권 국장 설재균 실장 서동훈 팀장 주대식 과장 김문선 팀장 김하정 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 건설사업관리용역 건설기술심의 (市 건설기술심의위원회)		‘22. 11. 15.		주대식 과장 김문선 팀장 심세라 주무관 김하정 주무관 ※ (관련) 市 정책기획관
❍ 대덕구 신청사 건립 기본설계 설계공모 심사위원회 개최 및 당선작 선정		‘22. 11. 16.		주대식 과장 김봉찬 팀장(대결) 김문선 팀장 심세라 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 기본설계 용역 계약 및 착수		‘22. 12. 21.		지인권 국장 주대식 과장 김문선 팀장 심세라 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 기본설계 착수보고회 결과 보고		‘23. 01. 17.		지인권 국장 조성운 과장 김문선 팀장 심세라 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 건설사업관리용역 사업수행능력, 기술제안서 평가위원회 개최		‘23. 01. 19.		조성운 과장 김문선 팀장 김하정 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 건설사업관리용역 낙찰자 선정 ✓ 01. 19. PQ심사, 01. 30. TP심사		‘23. 02. 15.		조성운 과장 김문선 팀장 이문용 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 기본설계용역 일시정지 통보		‘23. 03. 09.		조성운 과장 김문선 팀장 이문용 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 건설사업관리용역 계약 체결		‘23. 03. 15.		지인권 국장 조성운 과장 김문선 팀장 이문용 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 건설사업관리용역 일시정지 통보		‘23. 03. 17.		조성운 과장 김문선 팀장 이문용 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 기술자문단 구성‧운영 계획 수립		‘23. 05. 23.		최충규 구청장 이동한 부구청장 지인권 국장 조성운 과장 김문선 팀장 박연수 주무관
❍ 대전 연축 도시개발사업 실시계획 인가 신청 알림		‘23. 06. 02.		지인권 국장 조성운 과장 김문선 팀장 이문용 주무관
❍ 기본설계 및 건설사업관리 용역 일시정지 해제		‘23. 06. 09.		지인권 국장 조성운 과장 김문선 팀장 이문용 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 교통영향평가용역 입찰공고		‘23. 06. 23.		조성운 과장 김문선 팀장 이문용 주무관 박연수 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 공사수행방식 선정		‘23. 07. 04.		최충규 구청장 이동한 부구청장 지인권 국장 조성운 과장 김문선 팀장 이문용 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 기본설계용역 중간보고회 결과보고		‘23. 07. 10.		지인권 국장 조성운 과장 김문선 팀장 이문용 주무관 박연수 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 기본설계용역 일시정지 통보		‘23. 07. 21.		조성운 과장 김봉찬 팀장 이문용 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 교통영향평가용역 낙찰자 선정 통보		‘23. 07. 27.		조성운 과장 김봉찬 팀장 이문용 주무관 이은영 주무관 김하정 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 기본설계용역 과업내용 변경계획 보고		‘23. 07. 28.		최충규 구청장 이동한 부구청장 지인권 국장 조성운 과장 김봉찬 팀장 이문용 주무관 김하정 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 건설사업관리용역 기술인배치계획 변경 승인 통보		‘23. 09. 05.		조성운 과장 김봉찬 팀장 이문용 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 기본(계획 및 중간) 설계용역 과업내용변경 계약 체결		‘23. 09. 18.		지인권 국장 조성운 과장 이종오 팀장 김봉찬 팀장 이문용 주무관 이은영 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 공간혁신 컨설팅 결과보고		‘23. 11. 01.		지인권 국장 조성운 과장 김봉찬 팀장 이문용 주무관 김하정 주무관 권연수 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 관급자재 선정 추진계획		‘23. 11. 28.		최충규 구청장 이동한 부구청장 지인권 국장 조성운 과장 김봉찬 팀장 강경석 팀장 이문용 주무관 송신순 주무관 하승표 주무관 박호준 주무관 김선경 주무관 김순현 주무관 김하정 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 기술자문단 위촉식 및 자재선정심의회 개최 계획		‘23. 11. 24.		지인권 국장 조성운 과장 김봉찬 팀장 이문용 주무관 김하정 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 관급자재 선정 재심의 결과보고		‘23. 12. 18.		지인권 국장 조성운 과장 김봉찬 팀장 강경석 팀장 김순현 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 설계용역 완료보고회 개최계획		‘24. 01. 25.		지인권 국장 조성운 과장 김봉찬 팀장 이문용 주무관 김하정 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 교통영향평가 용역기간 변경 알림		‘24. 02. 16.		조성운 과장 김봉찬 팀장 이문용 주무관 김하정 주무관
❍ 공용건축물 건축협의(신축, 대덕구 신청사)		‘24. 03. 07.		조성운 과장 김봉찬 팀장 이문용 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 건설사업관리용역 기술인배치계획 변경 승인 통보		‘24. 03. 11.		조성운 과장 김봉찬 팀장 이문용 주무관 김하정 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 관급자재선정 결과보고		‘24. 03. 14.		지인권 국장 조성운 과장 김봉찬 팀장 강경석 팀장 송신순 주무관 김원섭 주무관 박호준 주무관 임아정 주무관 김순현 주무관 이문용 주무관 김하정 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 투자심상 추진방안 보고		‘24. 03. 18.		최충규 구청장 이성규 부구청장 지인권 국장 조성운 과장 설재균 실장 서동훈 팀장 김봉찬 팀장 이문용 주무관
❍ 구청사 매각 지연에 따른 대덕구 구청사 감정평가 계획 변경 검토보고		‘24. 03. 26.		지인권 국장 조성운 과장 이종오 팀장 박종현 주무관
❍ 2024년 대덕구 신청사 건립사업 추진계획 보고		‘24. 03. 27.		최충규 구청장 이성규 부구청장 지인권 국장 조성운 과장 이종오 팀장 김봉찬 팀장 강경석 팀장 정혜선 주무관 이문용 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 건설사업관리용역 기술지원 건설사업관리기술인(건축) 변경 승인 통보		‘24. 03. 29.		조성운 과장 김봉찬 팀장 이문용 주무관 김하정 주무관
❍ 2024년도 제2차 지방재정 투자사업 심사의뢰서 제출		‘24. 04. 04.		조성운 과장 김봉찬 팀장 이문용 주무관 김하정 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 공유재산 취득 변경계획		‘24. 04. 26.		이성규 부구청장 지인권 국장 조성운 과장 설재균 실장 서동훈 팀장 김봉찬 팀장 이문용 주무관 김하정 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 지방재정투자심사 추가자료 최종제출 보고		‘24. 06. 12.		조성운 과장 김봉찬 팀장 이문용 주무관 김하정 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 자재선정 재·추가심의 결과보고		‘24. 06. 18.		지인권 국장 조성운 과장 강격석 팀장 이문용 주무관 임아정 주무관 김순현 주무관
❍ 신청사 건립 지중열교환기 구매(집행) 계획		‘24. 07. 04.		최충규 구청장 이성규 부구청장 지인권 국장 조성운 과장 이호연 팀장 문병진 팀장 김봉찬 팀장 강경석 팀장 김순현 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 추진 방안 검토보고		‘24. 07. 01.		최충규 구청장 이성규 부구청장 지인권 국장 조성운 과장 설재균 실장 서동훈 팀장 이종오 팀장 김봉찬 팀장 이문용 주무관
❍ 대덕구 신청사 건립 공사 집행계획(안)		‘24. 07. 05.		조성운 과장 이종오 팀장 김봉찬 팀장 강경석 팀장 정혜선 주무관 임아정 주무관 김순현 주무관 이문용 주무관 김하정 주무관