정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	안산도서관 리모델링
② 추진배경	도서관시설의 협소, 노후화로 도서관 관리가 어렵고 이용자 불편 증가 및 생활문화체험 공간 확충 필요
③ 사업개요	‧ 공간확장 및 시설개선으로 복합문화공간으로써의 역할 강화 ‧ 공공도서관 증축 및 리모델링(본관) : 2,462.67㎡(지하 1층~지상 3층) ‧ 생활문화센터 조성(별관) : 261.9㎡(지상 1층~지상 2층)
④ 사업부서	도서관운영과(안산도서관)		⑤ 담당자	공업9급 송영찬 (부서장: 오민영)
⑥ 선정기준	기타		⑦ 사업기간	2021.9.~2024.9.
<그간 주요 추진내용>
‧ ‵22 생활SOC복합화사업 신청 ※ 참고 / 2021.9.24. 선정		‘21.04.13	강문숙 복합문화센터장 박신천 안산도서관장 표진권 주무관
‧ 기본계획 수립		‘21.09.28	박정현 구청장 강규창 부구청장 강문숙 복합문화센터장 박신천 도서관장 김범호 주무관
‧ 지방재정투자심사(서면 심사) ※ 참고 / 결과 : 원안 의결		‘22.01.20	전효진 기획홍보실장 노승민 주무관
‧ 건축기획 설계용역 추진계획		‘22.04.01	강문숙 복합문화센터장 진창구 도서관장 김범호 주무관
‧ 도서관 건립지원 보조금 교부 결정 및 지급 통보		‘22.04.15	市 문화예술과장 市 문화시설팀장 市 김광우 주무관
‧ 건축기획 사전검토 신청(의뢰) (건축공간 연구원) ‧ 구조안전진단 추진계획 수립 및 진행		‘22.05.26	강문숙 복합문화센터장 진창구 도서관장 김범호 주무관
‧ 공유재산관리계획(안) 및 공유재산 심의회 심의		‘22.10.13	강문숙 복합문화센터장 진창구 도서관장 김범호 주무관

<그간 주요 추진내용>
‧ 안산도서관 리모델링 사업 설계공모 일상감사	‘23.03.07	김건수 감사실장 박지만 감사팀장 심현명 주무관
‧ 안산도서관 리모델링 사업 건축전문위원회(건축계획) 심의	‘23.03.08	지인권 도시건설국장 주대식 건축과장 정일권 건축하거팀장
‧ 안산도서관 리모델링 중간 및 실시 설계공모 공고	‘23.03.09	최종대 평생학습원장 강문숙 도서관운영과장 진창구 도서관장 표진권 주무관
‧ 안산도서관 리모델링 중간 및 실시 설계 용역 계약의뢰	‘23.04.20	강문숙 도서관운영과장 진창구 도서관장 표진권 주무관
‧ 안산근린공원 도시관리계획 결정 변경 협조 요청	‘23.08.04	강문숙 도서관운영과장 진창구 도서관장 표진권 주무관
‧ 안산도서관 리모델링 사업 계획 변경 검토보고	‘23.10.05	정영주 평생학습원장 강문숙 도서관운영과장 진창구 도서관장 표진권 주무관
‧ 공유재산관리계획(안) 및 공유재산 심의회 심의	‘23.10.05	강문숙 도서관운영과장 진창구 도서관장 표진권 주무관
‧ 안산도서관 리모델링 중간 및 실시 설계 용역 변경 검토보고	‘23.11.01	이동한 부구청장 정영주 평생학습원장 강문숙 도서관운영과장 진창구 도서관장 표진권 주무관
‧ 안산도서관 리모델링 중간 및 실시 설계 용역 변경계약 의뢰	‘23.11.01	강문숙 도서관운영과장 진창구 도서관장 표진권 주무관
‧ 지방재정투자심사 ※ 참고 / 결과 : 원안 의결	‘23.11.06	설재균 기획홍보실장 이민정 주무관
‧ 안산도서관 리모델링 공사 집행계획	‘23.11.13	최충규 구청장 이동한 부구청장 정영주 평생학습원장 강문숙 도서관운영과장 진창구 도서관장 표진권 주무관

<그간 주요 추진내용>
‧ 안산도서관 리모델링 및 증축 공사 계약 의뢰 ※ 건축‧기계, 인테리어, 전기, 통신, 소방	‘23.11.20	강문숙 도서관운영과장 진창구 도서관장 표진권 주무관
‧ 도시계획시설사업(안산근린공원조성) 실시계획인가 고시 알림	‘23.12.21	이우걸 공원녹지과장 이호연 공원조성팀장
‧ 안산도서관 리모델링 및 증축 공사 착공계 ※ 건축‧기계, 인테리어, 전기, 통신, 소방	‘23.12.27	표진권 주무관
‧ 안산도서관 리모델링 및 증축 공사(건축,기계) 장기계속계약(2차분) 계약 의뢰	‘24.03.13	강문숙 도서관운영과장 진창구 도서관장 표진권 주무관
‧ 착공신고서 관련서류(2차분) 제출건	‘24.04.16	표진권 주무관