정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	민관협력 중소벤처 스마트혁신지구 조성사업
② 추진배경	낙후된 평촌공업지역 내 중소기업 공동활용 스마트플랫폼 조성을 통한 지역기업 경쟁력 강화 도모
③ 사업개요	사업기간: 2021. 11. ~ 2026. 12. / 구축이후 지속운영 ∙ 사업내용 － 대상지: 평촌동 142-1 / 토지 2,439㎡, 연면적 1262.55㎡ － 내 용: 스마트제조 공동플랫폼(제조 및 물류 공동활용공간, 친환경 공동 인프라, 교육장 및 회의실, 네트워크 협업공간 등) 구축 및 운영 ∙ 소요예산: 105억 원(국비 40, 시비 53, 구비 12)
④ 사업부서	대덕구청 경제과		⑤ 담당자	행정6급 송수정 (부서장:신영실)
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간	2021. 11. ~ 2026. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 민관협력 중소벤처 스마트혁신지구 조성사업 계획 변경 요청		’25.6.12.	박재범 경제과장 박병목 기업지원팀장 송수정 주무관
○ 평촌동 스마트혁신지구 조성사업 스마트플랫폼 장비 운영 활성화 방안 검토		’25.6.10.	최충규 구청장 노기수 부구청장 설재균 경제환경국장 박재범 경제과장 박병목 기업지원팀장 송수정 주무관
○ 공장동 본격운영		’24.10.	대덕경제재단 위탁 수행
○ 평촌동 스마트혁신지구 스마트플랫폼 공장동 준공		’24.3.	대덕경제재단 위탁 수행
○ 민관협력 중소벤터 스마트혁신지구 조성 연접토지 교환 및 매매계약		’23.12.18.	정영주 경제환경국장 이선규 경제과장 김아름 기업지원팀장
○ 건축, 전기, 소방 등 공사착공		’23.8.	대덕경제재단 위탁 수행
○ 공용장비(2차) 입찰 및 계약		’23.6.	대덕경제재단 위탁 수행
○ 건축설계 용역완료 보고 및 건설사업관리계획 수립		’23.5.	대덕경제재단 위탁 수행
○ 건축허가(협의) 완료		’23.5.	대덕경제재단 위탁 수행
○ 건축물 해체공사 및 감리완료, 경관심의 완료		’23.2.1.	이선규 경제과장 김아름 기업지원팀장 이은미 주무관
○ 공용장비(1차) 입찰 및 계약		’22.11.	대덕경제재단 위탁 수행
○ 스마트혁신지구 조성사업을 위한 공동활용장비 구축 설명회 개최		’22.10.5.	이선규 일자리경제과장 김아름 노사상생팀장
○ 건축 기본 및 실시설계 용역		’22.9.	대덕경제재단 위탁 수행
○ 건축물 석면조사 및 해체․제거		’22.6.24.	이선규 일자리경제과장 김아름 노사상생팀장
○ 공공건축심의 완료 / 대덕구 건축위원회		’22.3.23.	이선규 일자리경제과장 김아름 노사상생팀장 이은미 주무관
○ 사업부지 토지 및 건물 매입 및 등기 이전 완료		’21.12.27.	강규창 부구청장 이근수 기후경제국장 이선규 일자리경제과장 김아름 노사상생팀장
○ 중소벤처기업부 공모사업 선정		’21.7.28.	김아름 노사상생팀장