① 정책사업명	장동~이현 간 도로개설 사업
② 추진배경	·장동~이현간 도로개설을 통해 동-서를 연결하는 교통망 구축 ·도심지와 대청호, 계족산을 연계하는 관광벨트 구축
③ 사업개요	사업기간 : 2024. ~ 2029. 사업규모 : 도로개설 L=1.7km, B=10m(2차로) 사 업 비 : 248억원(국비 124, 시비 62, 구비 62)
④ 사업부서	도시계획과				⑤ 담당자	시설8급 김재현 (부서장:조성운)
⑥ 선정기준	·구정 주요 정책사업 ·10억원 이상의 예산 투입				⑦ 사업기간	2024. ~ 2029.
<그간 주요 추진내용>
○ 사업추진계획 수립 ※ 도시계획과-2359(2024. 3. 5.)			‘24.03.05.		최충규 구청장 이성규 부구청장 지인권 국장 곽효상 과장 오지영 팀장 이승우 주무관
○ 중앙투자심사 의뢰 ※ 도시계획과-3362(2024. 4. 1.)			‘24.04.01.		곽효상 과장 오지영 팀장 이승우 주무관
○ 장동~이현간 도로개설공사 기본 및 실시설계용역 장기계속계약 추진 검토 ※ 도시계획과-6815(2024. 7. 1.)			‘24.07.01.		지인권 국장 곽효상 과장 오지영 팀장 이승우 주무관
○ 장동~이현간 도로개설공사 기본 및 실시설계용역 사업수행능력평가(PQ) 추진계획 수립 ※ 도시계획과-7226(2024. 7. 10.)			‘24.07.10.		지인권 국장 곽효상 과장 오지영 팀장 이승우 주무관
○ 장동~이현간 도로개설공사 기본 및 실시설계용역 일상감사(계약심사) 의뢰 ※ 도시계획과-7293(2024. 7. 11.)			‘24.07.11.		곽효상 과장 오지영 팀장 이승우 주무관
○ 주한미군 공여구역주변지역 등 발전종합계획 변경 확정		‘24.10.30.		대전광역시 도시계획과-10701(2024. 10. 30.)
○ 주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업 국·시비 보조금 교부		‘24.11.07.		대전광역시 도시계획과-10701(2024. 11. 7.)
○ 장동~이현간 도로개설공사 기본 및 실시설계용역(1차분) 집행품의 ※ 도시계획과-11890(2024. 11. 14.)		‘24.11.14.		최충규 구청장 이성규 부구청장 지인권 국장 곽효상 과장 이승우 주무관 홍다경 주무관
○ 장동~이현간 도로개설공사 기본 및 실시설계용역 사업수행능력 평가(PQ) 수행 ※ 도시계획과-13376(2024. 12. 17.) 및 도시계획과-564(2025. 1. 13.)		‘24.12.24.		지인권 국장 곽효상 과장 오지영 팀장 홍다경 주무관
○ 장동~이현간 도로개설공사 기본 및 실시설계용역(1차분) 착수 ※ 도시계획과-2030(2025. 2. 25.)		‘25.02.25.		기본 및 실시설계용역(1차분) 착수
○ 장동~이현간 도로개설공사 기본 및 실시설계용역 착수보고회 개최 ※ 도시계획과-2906(2025. 3. 21.) 및도시계획과-3232(2025. 3. 31.)		‘25.03.25.		조성운 과장 오지영 팀장 김재현 주무관
○ 장동~이현간 도로개설공사 기본 및 실시설계용역(2차분) 집행품의 ※ 도시계획과-4919(2025. 5. 13.)		‘25.05.13.		최충규 구청장 노기수 부구청장 곽효상 국장 조성운 과장 오지영 팀장 김재현 주무관
○ 장동~이현간 도로개설공사 기본 및 실시설계용역(2차분) 착수 ※ 도시계획과-5373(2025. 5. 26.)		‘25.05.26.		기본 및 실시설계용역(2차분) 착수
○ 장동~이현간 도로개설공사 도로 노선기본계획(안) 관계기관 협의 ※ 도시계획과-5906(2025. 6. 12.)		‘25.06.12.		조성운 과장 오지영 팀장 김재현 주무관
○ 주한미군 공여구역주변지역 등 발전종합계획 변경 요청 ※ 도시계획과-6199(2025. 6. 19.)		‘25.06.19.		장동~이현간 도로개설공사 기간 연장 당초: 2024. ~ 2027. / 변경: 2024. ~ 2029. 조성운 과장 오지영 팀장 김재현 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서