정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	장동~이현 간 도로개설 사업
② 추진배경	·장동~이현간 도로개설을 통해 동-서를 연결하는 교통망 구축 ·도심지와 대청호, 계족산을 연계하는 관광벨트 구축
③ 사업개요	사업기간 : 2024. ~ 2029. 사업규모 : 도로개설 L=1.8km, B=10m / 2차로 사 업 비 : 248억원(국비 124, 시비 62, 구비 62)
④ 사업부서	도시계획과		⑤ 담당자	시설8급 이희지 (시설5급 이명구)
⑥ 선정기준	·구정 주요 정책 ·10억원 이상의 예산 투입		⑦ 사업기간	2024. ~ 2029.
<그간 주요 추진내용>
○ 사업추진계획 수립		’24.03.05.	최충규 구청장 이성규 부구청장 지인권 국장 곽효상 과장 오지영 팀장 이승우 주무관
○ 중앙투자심사 의뢰		’24.04.01.	곽효상 과장 오지영 팀장 이승우 주무관
○ 장동~이현 간 도로개설공사 기본 및 실시설계용역 장기계속계약 추진 검토		’24.07.01.	지인권 국장 곽효상 과장 오지영 팀장 이승우 주무관
○ 장동~이현 간 도로개설공사 기본 및 실시설계용역 사업수행능력평가(PQ) 추진계획 수립		’24.07.10.	지인권 국장 곽효상 과장 오지영 팀장 이승우 주무관
○ 장동~이현 간 도로개설공사 기본 및 실시설계용역 일상감사 (계약심사) 의뢰		’24.07.11.	곽효상 과장 오지영 팀장 이승우 주무관

<그간 주요 추진내용>
○ 주한미군 공여구역주변지역 등 발전종합계획 변경 확정	’24.10.30.	대전광역시 도시계획과-10701(2024. 10. 30.)
○ 주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업 국·시비 보조금 교부	’24.11.07.	대전광역시 도시계획과-10701(2024. 11. 7.)
○ 장동~이현 간 도로개설공사 기본 및 실시설계용역(1차분) 집행품의	’24.11.14.	최충규 구청장 이성규 부구청장 지인권 국장 곽효상 과장 이승우 주무관 홍다경 주무관
○ 장동~이현 간 도로개설공사 기본 및 실시설계용역 사업수행능력 평가(PQ) 수행	’24.12.24.	지인권 국장 곽효상 과장 오지영 팀장 홍다경 주무관
○ 장동~이현 간 도로개설공사 기본 및 실시설계용역(1차분) 착수	’25.02.25.	기본 및 실시설계용역(1차분) 착수
○ 장동~이현 간 도로개설공사 기본 및 실시설계용역 착수보고회 개최	’25.03.25.	조성운 과장 오지영 팀장 김재현 주무관
○ 장동~이현 간 도로개설공사 기본 및 실시설계용역(2차분) 집행품의	’25.05.13.	최충규 구청장 노기수 부구청장 곽효상 국장 조성운 과장 오지영 팀장 김재현 주무관

<그간 주요 추진내용>
○ 장동~이현 간 도로개설공사 기본 및 실시설계용역(2차분) 착수	’25.05.26.	기본 및 실시설계용역(2차분) 착수
○ 장동~이현 간 도로개설공사 도로 노선기본계획(안) 관계기관 협의	’25.06.12.	조성운 과장 오지영 팀장 김재현 주무관
○ 주한미군 공여구역주변지역 등 발전종합계획 변경 요청	’25.06.19.	장동~이현간 도로개설공사 기간 연장 당초: 2024. ~ 2027. / 변경: 2024. ~ 2029. 조성운 과장 오지영 팀장 김재현 주무관
○ 장동~이현 간 도로개설공사 소규모 환경영향평가 용역 착수	’25.12.04.	노기수 부구청장 조성운 과장 오지영팀장 이승우 주무관 김재현 주무관
○ 장동~이현 간 도로개설공사 소규모 재해영향평가 용역 착수	’25.12.04.	조성운 과장 오지영 팀장 이승우 주무관 김재현 주무관
○ 장동~이현 간 도로개설공사 경관심의 용역 착수	’25.12.22.	노기수 부구청장 조성운 과장 오지영 팀장 김재현 주무관
○ 장동~이현 간 도로개설사업 기본 및 실시설계용역 기본설계 노선(안) 주민설명회 개최	’26.03.05.	조성운 국장 이명구 과장 김태훈 팀장 이희지 주무관