정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	효자구역(1단계) 주거환경개선사업(기존사업)
② 추진배경	기반시설 정비 및 공동주택 건설을 통한 노후 불량주택 밀집지역의 열악한 주거환경을 개선하고 주민 삶의 질 향상 도모
③ 사업개요	위 치 : 대덕구 읍내동 240번지 일원 사업기간 : 2007. ~ 2029. 구역면적 : 6만6천㎡ 사업계획 : 공동주택 1,620세대(분양 1,296, 임대 324) 사업시행자 : 대덕구, LH, 계룡건설 등 민간컨소시엄
④ 사업부서	도시계획과		⑤ 담당자	시설7급 강찬구 (시설5급 이명구)
⑥ 선정기준	· 기타(구정 주요 정책) · 대규모 예산		⑦ 사업기간	2007. ~ 2029.
<그간 주요 추진내용>
○ 효자지구 주거환경개선사업 정비구역 지정 고시(市)		’07.03.02.	정비구역 및 정비계획 지정 고시 알림(市→區)
○ 효자지구 주거환경개선사업 시행계획 협약 체결(區↔LH)		’07.08.07.	시행협약서 날인 송부(區→LH) 정진명 과장 한성수 담당 전종현 주무관
○ 효자구역 정비계획(변경) 결정 및 정비구역 지정 고시(市)		’18.07.18.	정비계획(구역지정) 변경 고시 알림(市→區)
○ 효자구역 주거환경개선사업 공동시행 협약 체결(LH↔민간컨소시엄)		’19.04.25.	공동시행 협약 체결(LH↔계룡건설, 대우건설, 태영건설)
○ 교육환경보호위원회 심의(市 교육청)		’19.09.21.	교육환경평가 권고사항 조치계획 송부(市 교육청→區)
○ 효자구역 정비계획(변경) 결정 및 정비구역 지정 고시(市)		’20.05.29.	정비계획(변경) 결정 및 정비구역 지정 고시 알림(市→區)
○ 효자구역 정비계획(변경) 결정 및 정비구역 지정 고시(市)		’21.04.07.	정비계획(변경) 결정 및 정비구역 지정 고시 알림(市→區)

<그간 주요 추진내용>
○ 사업시행인가 고시	’22.08.26.	사업시행계획인가(區)
○ 보상계획 및 열람공고	’23.12.29.	보상계획 및 열람공고(LH)
○ 보상협의회 설치⸱구성	’24.01.11.	보상협의회 설치⸱구성계획 보고 이성규 부구청장 지인권 국장 곽효상 과장 문병진 팀장 박호준 주무관
○ 보상협의회 위원 위촉	’24.01.31.	보상협의회 위원 위촉 검토보고 이성규 부구청장 지인권 국장 곽효상 과장 문병진 팀장 박호준 주무관
○ 보상협의회 개최	’24.02.27.	제1차 보상협의회 개최(區)
○ 보상협의회 결과	’24.02.29.	제1차 보상협의회 결과보고 이성규 부구청장 지인권 국장 곽효상 과장 문병진 팀장 박호준 주무관
○ 감정평가 추진	’24.04.~05.	감정평가 추진(LH)
○ 보상협의회 위원 위촉(변경)	’24.05.23.	보상협의회 위원 위촉(변경) 검토보고 이성규 부구청장 지인권 국장 곽효상 과장 문병진 팀장 박호준 주무관
○ 보상협의회 개최	’24.06.04.	제2차 보상협의회 개최(區)
○ 보상협의회 결과	’24.06.05.	제2차 보상협의회 결과보고 이성규 부구청장 지인권 국장 곽효상 과장 문병진 팀장 박호준 주무관

<그간 주요 추진내용>
○ 수용재결신청에 따른 열람공고	’25.02.19.	수용재결신청서 열람공고(1차 ~ 4차)
○ 보상협의 공고문(공시송달) 공고	’25.03.16.	보상협의(공시송달) 공고 (토지151건, 지장물 469건)
○ 수용재결신청에 따른 열람공고	’25.06.23.	수용재결신청서 열람공고(5차)
○ 수용재결 공고문(공시송달) 공고	’25.08.22.	수용재결(1차~3차) 공시송달 공고(18건)
○ 수용재결 공고문(공시송달) 공고	’25.08.22.	수용재결(5차) 공시송달 공고(22건)
○ 정비계획(경미한 사항) 변경 요청	’26.02.24.	한국토지주택공사 → 區
○ 정비계획 결정(변경) 및 정비구역 지정 신청(區→市)	’26.06.25.	이명구 과장 정성희 팀장 강찬구 주무관
○ 정비계힉 결정(변경) 및 정비구역 고시(市)	’26.07.09.	정비계힉 결정(변경) 및 정비구역 고시 알림(市→區)