대전광역시 공고 제 2020 – 612호

「도시가스사업법」제18조의3 제1항의 규정에 의거 2020년 도시가스 공급시설 공사계획을 아래와 같이 공고합니다.

2020년  3월  9일

대 전 광 역 시 장

2020년 도시가스 공급시설 공사계획

1. 관련근거

가. 「도시가스사업법」제18조의3,

나. 「도시가스사업법」시행규칙 제30조 제1항

2. 도시가스 공급시설 공사계획 (2020년 ~ 2021년)

가. 배관 및 정압기 설치계획

나. 공사실시계획

다. 지역별 가스공급시기 및 대상 수용가 수

3. 기타사항

가. 기타 자세한 사항은 대전광역시 기반산업과 (☎042-270-0432) 또는

씨엔씨티에너지(주) (☎042-336-5215)로 문의하여 주시기 바랍니다.

붙 임   1) 도시가스 공급시설 공사계획  1부.

2) 도시가스 공급시설 자치구별 공사계획 (2020년~2021년)  1부.   끝.

(붙임 1)

도시가스 공급시설 공사계획

□ 2020년 배관 및 정압기 설치계획

① 배관

(단위 : m)

구 분	계	2020년	2021년	비 고
연 장	49,337	35,518	13,819

② 정압기 : 2개소

- (동구 용운주공, 대덕구 법동주공 1단지)재건축  : 사업비 140백만원

□ 2020년 공사실시계획

구 분	합 계	단독주택	공동주택	분기공사	택지	정압기
사 업 건 수	210	113	10	85	0	2
투자사업비(백만원)	11,472	6,000	313	5,019	0	140

□ 자치구별 가스공급시기 및 대상수용가 수

① 2020년 / 공급(공사)시기 : 3월 ~ 12월

구 분	총 계	동 구	중 구	서 구	유성구	대덕구	비 고
배관연장(m)	35,518	5,579	6,567	7,138	12,377	3,857
대상수용가수	13,272	3,159	1,374	2,765	2,907	3,067

② 2021년 / 공급(공사)시기 : 3월 ~ 12월

구 분	총 계	동 구	중 구	서 구	유성구	대덕구	비 고
배관연장(m)	13,819	1,919	2,129	1,592	6,730	1,449
대상수용가수	18,388	5,064	1,190	4,033	5,902	2,199

(붙임 2)

2020년 도시가스 공급시설 자치구별 공급계획

《총괄계획》

연번	구 분	합계	동구	중구	서구	유성구	대덕구
1	배관연장(m)	35,518	5,579	6,567	7,138	12,377	3,857
2	공급세대(세대)	13,260	3,159	1,374	2,765	2,907	3,067

<대덕구> 2020년

No	공 사 구 간	연장 (m)	공사 시기(월)	공급 시기(월)	주 수요처	세 대	압 력	비 고
	대덕구 합계	3,857				3,067
	소계	2,952				2,871
1	대덕구 법동 202-3 ~ 법동 202-1일대	30	3-11	4-12	주택 등	5	저압
2	대덕구 신탄진동 175-15 ~ 신탄진동 176-2일대	165	3-11	4-12	주택 등	8	저압
3	대덕구 송촌동 479-10 ~ 송촌동 501-1일대	20	3-11	4-12	주택 등	2	저압
4	대덕구 읍내동 54 ~ 읍내동 517-14일대	650	3-11	4-12	주택 등	15	저압
5	대덕구 오정동 27-1 ~ 오정동 43일대	100	3-11	4-12	주택 등	12	저압
6	대덕구 오정동 658-9 ~ 오정동 658-15일대	90	3-11	4-12	주택 등	6	저압
7	대덕구 오정동 344-2 ~ 오정동 344-3일대	125	3-11	4-12	주택 등	4	저압
8	대덕구 평촌동 542-38 ~ 평촌동 542-40일대	55	3-11	4-12	주택 등	2	저압
9	대덕구 덕암동 18-6 ~ 덕암동 44-10일대	90	3-11	4-12	주택 등	5	저압
10	대덕구 신탄진동 123-20 ~ 신탄진동 123-27일대	75	3-11	4-12	주택 등	5	저압
11	대덕구 신탄진동 123-49 ~ 신탄진동 123-39일대	55	3-11	4-12	주택 등	3	저압
12	대덕구 신탄진동 142-19 ~ 신탄진동 143-30일대	60	3-11	4-12	주택 등	6	저압
13	대덕구 송촌동 223-1 ~ 송촌동 223-7일대	65	3-11	4-12	주택 등	3	저압
14	대덕구 신대동 363-5 ~ 신대동 373일대	50	3-11	4-12	주택 등	1	저압
15	대덕구 오정동 56-3 ~ 오정동 56-1일대	165	3-11	4-12	주택 등	9	저압
16	대덕구 오정동 439-3 ~ 오정동 439-1일대	50	3-11	4-12	주택 등	4	저압
17	대덕구 오정동 445-8 ~ 오정동 445-10일대	20	3-11	4-12	주택 등	2	저압
18	대덕구 석봉동 483 서희스타힐스	20	2	4	공동주택	835	저압
19	대덕구 법동 284-10 법동1 주택재건축	100	5	9	공동주택	1503	저압
20	대덕구 상서동 326-151 상서지구 행복주택	300	8	12	공동주택	296	저압
21	대덕구 법동 284-10 법동1 주택재건축정압기		5	9	공동주택		중저압
22	대덕구 대화동 일원 등(분기공사)	28	3~11	4-12	주택 등	6	저압
23	대덕구 덕암동 일원 등(분기공사)	443	3~11	4-12	주택 등	96	저압
24	대덕구 목상동 일원 등(분기공사)	6	3~11	4-12	주택 등	2	저압
25	대덕구 비래동 일원 등(분기공사)	106	3~11	4-12	주택 등	23	저압
26	대덕구 상서동 일원 등(분기공사)	6	3~11	4-12	주택 등	2	저압
27	대덕구 석봉동 일원 등(분기공사)	78	3~11	4-12	주택 등	16	저압

<대덕구> 2020년

No	공 사 구 간	연장 (m)	공사 시기(월)	공급 시기(월)	주 수요처	세 대	압 력	비 고
	소계	905				196
28	대덕구 송촌동 일원 등(분기공사)	116	3~11	4-12	주택 등	25	저압
29	대덕구 신대동 일원 등(분기공사)	4	3~11	4-12	주택 등	1	저압
30	대덕구 신탄진동일원등(분기공사)	386	3~11	4-12	주택 등	84	저압
31	대덕구 오정동 일원 등(분기공사)	212	3~11	4-12	주택 등	46	저압
32	대덕구 와동 일원 등(분기공사)	6	3~11	4-12	주택 등	2	저압
33	대덕구 읍내동 일원 등(분기공사)	11	3~11	4-12	주택 등	2	저압
34	대덕구 중리동 일원 등(분기공사)	126	3~11	4-12	주택 등	27	저압
35	대덕구 평촌동 일원 등(분기공사)	44	3~11	4-12	주택 등	9	저압

2021년 도시가스 공급시설 자치구별 공급계획

《총괄계획》

연번	구 분	합계	동구	중구	서구	유성구	대덕구
1	배관연장(m)	13,819	1,919	2,129	1,592	6,730	1,449
2	공급세대(세대)	18,388	5,064	1,190	4,033	5,902	2,199

<대덕구> 2021년

No	공 사 구 간	연장 (m)	공사 시기(월)	공급 시기(월)	주 수요처	세 대	압 력
	대덕구 합계	1,449				2,199
1	대덕구 동일스위트	200	7	11	공동주택	1,757	저압
2	대덕구 동일스위트 정압기		7	11	공동주택		중저압
3	대덕구 대화동 일원 등(분기공사)	24	3-11	4-11	주택 등	8	저압
4	대덕구 덕암동 일원 등(분기공사)	332	3-11	4-11	주택 등	118	저압
5	대덕구 목상동 일원 등(분기공사)	8	3-11	4-11	주택 등	3	저압
6	대덕구 비래동 일원 등(분기공사)	75	3-11	4-11	주택 등	26	저압
7	대덕구 상서동 일원 등(분기공사)	10	3-11	4-11	주택 등	4	저압
8	대덕구 석봉동 일원 등(분기공사)	63	3-11	4-11	주택 등	22	저압
9	대덕구 송촌동 일원 등(분기공사)	92	3-11	4-11	주택 등	32	저압
10	대덕구 신대동 일원 등(분기공사)	8	3-11	4-11	주택 등	3	저압
11	대덕구 신탄진동 일원 등(분기공사)	167	3-11	4-11	주택 등	59	저압
12	대덕구 연축동 일원 등(분기공사)	17	3-11	4-11	주택 등	6	저압
13	대덕구 오정동 일원 등(분기공사)	170	3-11	4-11	주택 등	60	저압
14	대덕구 와동 일원 등(분기공사)	33	3-11	4-11	주택 등	12	저압
15	대덕구 읍내동 일원 등(분기공사)	67	3-11	4-11	주택 등	24	저압
16	대덕구 중리동 일원 등(분기공사)	166	3-11	4-11	주택 등	59	저압
17	대덕구 평촌동 일원 등(분기공사)	17	3-11	4-11	주택 등	6	저압