계약심사(일상감사) 조정사유서

1. 공사개요

❍ 공 사 명: 가로경관 및 보행환경 개선공사(육교 및 고가하부)

❍ 위    치: 오정동 727번지, 오정동 398-2번지 일원

❍ 공사규모: 육교 및 고가하부 정비 1식

❍ 공사기간: 착공일로부터 180일

2. 심사결과

(단위: 천 원)

구 분	요청금액	심사금액	조정금액	조 정 율
총공사비	320,215	301,854	-18,361	-5.73%

3. 적용기준

❍ 2022년 건축공사 원가계산 제비율 적용기준

❍ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준, 제2장 예정가격 작성요령

4. 주요 조정내용

□ 시공여건, 지형조건 및 경제성을 고려하여 단가 등 조정

- 트럭탑재형 크레인(15톤) 수량: 5일 → 3일

- 알루미늄 시트패널 재료 할증: 57.5% → 5%

- 철근 가공 및 조립: 현장가공‧조립 → 공장가공 및 현장조립

- 조달청 시장시공가격 적용: 유성페인트(붓칠)

□ 내역서 및 수량산출서 조정

- 중복 적용 공종, 시공여건, 경제성, 표준시방서 기준 등을 반영하여 수량 조정

□페인트면 긁어내기 → 제외 / 재도장 시 바탕처리와 중복(거더, 교각)

□유성페인트(붓칠, 2회) → 제외 / 강교도장(롤러+붓, 3회)와 중복(거더, 교각)

□재도장시 바탕처리, 강교도장: 천장(402㎡) → 천장(383㎡) + 벽면(33㎡)

□재도장시 바탕처리 → 제외 / 콘크리트 단면처리와 중복(기초, 난간 및 연석)

- 부대공 내용 불분명, 누락 공종 및 자재 추가 등 조정

□교통통제 등 → 교통통제 및 안전관리, 교통표지판 설치 및 철거

□교통표지판(교통안전표지판 3종, 라바콘 50개 등) 누락 자재 추가

□ 일위대가 및 단가산출 조정

- 건설공사 표준품셈, 현장여건, 경제성 등 고려하여 기초단가 조정

□강재도장

① 시공방법: 붓칠ㆍ롤러(100%) → 붓칠(30%)+롤러(70%)

② 적용 품: 녹막이 페인트 칠(3회) → 녹막이 페인트 칠(1회)+유성페인트 칠(2회)

□재도장 시 바탕처리(천장작업 할증): 합계의 20%(경비) → 노무비의 20%(노무비)

□교통통제 및 안전처리: 교통관리인(보통인부): 4인/일 → 2인/일

□황금편백, 공작단풍, 삼색조팝나무 식수 수량 할증 제외

□콘크리트블록포장: 모래기초지정 → 제외 / 보도용 블록 설치품에 포함

□공구손료 및 경장비, 기구손료: 노무비, 재료비 → 기계경비

- 건설공사 표준품셈 적용

□콘크리트 균열보수(주입공법): 인부 직종별 수량 조정, 주입재 추가 계상

□블록깔기 → 보도용 블록 설치

□ 자재대 조정

□유류대: (경유) 1,818원/ℓ → 1,731원/ℓ,  (휘발유) 1,813원/ℓ → 1,643원/ℓ