대전광역시 공고 제 2024 – 350호

「도시가스사업법」제18조의3 제1항의 규정에 따라 2024년 도시가스 공급시설 공사계획을 아래와 같이 공고합니다.

2024년   2월   21일

대 전 광 역 시 장

2024년 도시가스 공급시설 공사계획

1. 관련근거

가. 「도시가스사업법」제18조의3

나. 「도시가스사업법」시행규칙 제30조 제1항

2. 도시가스 공급시설 공사계획 (2024년 ~ 2025년)

가. 배관 및 정압기 설치계획

나. 공사실시계획

다. 지역별 가스공급시기 및 대상 수용가 수

3. 기타사항

가. 공사계획에 따른 가스공급시설을 설치하지 아니할 수 있는 경우

(도시가스사업법 시행규칙 제30조제2항)

- 도로굴착 허가를 받지 못한 경우

- 가스공급시설의 설치 예정일부터 1년 이내에 도로의 확장․포장이 이루어지도록 계획된 경우

- 지역재개발이 추진될 예정인 경우

- 그 밖에 예상하지 못한 사유가 발생하여 도시가스의 공급이 불가능하다고 판단되는 경우

나. 기타 자세한 사항은 대전광역시 에너지정책과 (☎042-270-0431) 또는

씨엔씨티에너지(주) (☎042-336-5236)로 문의하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 도시가스 공급시설 공사계획 1부.

2. 도시가스 공급시설 자치구별 공급계획 (2024년~2025년) 1부.  끝.

[붙임 1]

도시가스 공급시설 공사계획

□ 2024년 배관 및 정압기 설치계획

① 배관

(단위: m)

구 분	계	2024년	2025년	비 고
연 장	19,515	15,557	3,958

② 정압기 : 6개소 (사업비 600백만원)

- 동구 1개소(천동리더스시티), 유성구 1개소(장대공공주택),

중구 2개소(하늘채스카이앤, 하늘채엘센트로),

서구 2개소(호반써밋그랜드센트럴, 용문더샵엘리프)

□ 2024년 공사실시계획

구 분	합 계	재원 (단독주택)	공동주택	분기공사	정압기
사 업 건 수	205	74	34	91	6
투자사업비(백만원)	9,720	6,300	1,712	1,108	600

□ 자치구별 가스공급시기 및 대상수용가 수

① 2024년 / 공급(공사)시기 : 3월 ~ 12월

구 분	총 계	동 구	중 구	서 구	유성구	대덕구	비 고
배관연장(m)	15,557	8,287	2,284	1,374	2,781	831
대상수용가수	17,169	6,017	3,942	715	4,515	1,980

② 2025년 / 공급(공사)시기 : 3월 ~ 12월

구 분	총 계	동 구	중 구	서 구	유성구	대덕구	비 고
배관연장(m)	3,958	325	1,072	751	1,531	279
대상수용가수	16,858	645	3,746	7,884	3,187	1,396

[붙임 2]

2024년 도시가스 공급시설 자치구별 공급계획

<대덕구> 2024년

No	공 사 구 간	연장 (m)	공사 시기(월)	공급 시기(월)	주 수요처	세 대	압 력	비 고
	대덕구 합계	831				1,980
	소계	831				1,980
1	대덕구 대화동 35-677 ~ 대화동 35-227일대	20	3-11	4-12	주택 등	2	저압
2	대덕구 목상동 149-5 ~ 목상동 148-8일대	30	3-11	4-12	주택 등	2	저압
3	대덕구 비래동 146-2 ~ 비래동 146-15일대	20	3-11	4-12	주택 등	2	저압
4	대덕구 비래동 563 ~ 비래동 559-21일대	35	3-11	4-12	주택 등	3	저압
5	대덕구 상서동 220 ~ 신일동 61일대	200	3-11	4-12	주택 등	2	저압
6	대덕구 읍내동 315-17 ~ 읍내동 315-14일대	20	3-11	4-12	주택 등	2	저압
7	대덕구 오정동 488-16 ~ 오정동 487-11일대	90	3-11	4-12	주택 등	3	저압
8	대덕구 중리동 408-29 ~ 중리동 408-25일대	110	3-11	4-12	주택 등	4	저압
9	대덕구 덕암동 61-21 ~ 덕암동 61-19일대	30	3-11	4-12	주택 등	2	저압
10	대덕구 대덕브라운스톤	-	‘23년	2	공동주택	910	저압
11	대덕구 동일스위트리버스카이2차	-	‘23년	2	공동주택	655	저압
12	대덕구 신탄진다가온청년주택	5	3-5	6	공동주택	237	저압
13	대덕구 송촌동 소형 공동주택 560-1	5	3-9	10	공동주택	29	저압
14	대덕구 엘리프송촌더파크	100	3-11	‘25.5.	공동주택	0	저압
15	대덕구 대화동 일원 등(분기(기타)공사)	2	3-11	4-12	주택 등	2	저압
16	대덕구 덕암동 일원 등(분기(기타)공사)	24	3-11	4-12	주택 등	67	저압
17	대덕구 법동 일원 등(분기(기타)공사)	2	3-11	4-12	주택 등	2	저압
18	대덕구 비래동 일원 등(분기(기타)공사)	9	3-11	4-12	주택 등	2	저압
19	대덕구 상서동 일원 등(분기(기타)공사)	7	3-11	4-12	주택 등	5	저압
20	대덕구 석봉동 일원 등(분기(기타)공사)	6	3-11	4-12	주택 등	5	저압
21	대덕구 송촌동 일원 등(분기(기타)공사)	26	3-11	4-12	주택 등	2	저압
22	대덕구 신탄진동 일원 등(분기(기타)공사)	14	3-11	4-12	주택 등	18	저압
23	대덕구 연축동 일원 등(분기(기타)공사)	2	3-11	4-12	주택 등	5	저압
24	대덕구 오정동 일원 등(분기(기타)공사)	8	3-11	4-12	주택 등	2	저압
25	대덕구 와동 일원 등(분기(기타)공사)	15	3-11	4-12	주택 등	2	저압
26	대덕구 중리동 일원 등(분기(기타)공사)	51	3-11	4-12	주택 등	15	저압

2025년 도시가스 공급시설 자치구별 공급계획

<대덕구> 2025년

No	공 사 구 간	연장 (m)	공사 시기(월)	공급 시기(월)	주 수요처	세 대	압 력	비 고
	대덕구 합계	279				1,396
1	대덕구 엘리프송촌더파크	-	‘24년	5	공동주택	799	저압
2	대덕구 대화동 일원 등(분기(기타)공사)	8	3-11	4-12	주택 등	5	저압
3	대덕구 덕암동 일원 등(분기(기타)공사)	32	3-12	4-13	주택 등	63	저압
4	대덕구 목상동 일원 등(분기(기타)공사)	5	3-13	4-14	주택 등	3	저압
5	대덕구 비래동 일원 등(분기(기타)공사)	21	3-14	4-15	주택 등	27	저압
6	대덕구 석봉동 일원 등(분기(기타)공사)	73	3-15	4-16	주택 등	153	저압
7	대덕구 송촌동 일원 등(분기(기타)공사)	18	3-16	4-17	주택 등	66	저압
8	대덕구 신일동 일원 등(분기(기타)공사)	10	3-17	4-18	주택 등	5	저압
9	대덕구 신탄진동 일원 등(분기(기타)공사)	31	3-18	4-19	주택 등	136	저압
10	대덕구 오정동 일원 등(분기(기타)공사)	32	3-19	4-20	주택 등	22	저압
11	대덕구 중리동 일원 등(분기(기타)공사)	45	3-20	4-21	주택 등	115	저압
12	대덕구 평촌동 일원 등(분기(기타)공사)	4	3-21	4-22	주택 등	2	저압

※ 본 공사계획은 타 공사와의 연계, 수요자 사정, 건설사의 준공일정 등에 따라 변경될 수 있습니다