109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 대덕구에서 ‘20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후
신탄진동동청사 부지매입	2,812	2,370	96	346	-	2021	2007	100
주민자치회 시범사업	907	123	240	294	250	지속 추진	2019	75
2020 대청호 대덕뮤직페스티벌	866	270	4	272	320	계속사업	2020	10
2020 대코맥주 페스티벌	1,194	288	90	408	408	2020	2020	32
새로운 어린이 공원조성	3,876		407	469	3,000	2024	2019	20
미세먼지차단숲 조성	6,796	1,894	1,202	1,700	2,000	2023	2018	45.5
송촌동 상점가 주차환경개선사업	9,181	5,511	3,670	-	-	2020	2017	100
효자지구 주거환경 개선사업	11,396	5,196	928	2,000	3,272	2026	2019	50
장동(욕골)지구 주거환경개선사업	7,808	6,977	769	-	-	2021	2014	100
장동 욕골지구 새뜰마을 사업	3,983	3,619	146	-	-	2021	2015	100
장동~상서 도로개설사업	8,000	756	2,644	200	4,400	2023	2020	50
용호교 개량사업	850	-	38	812	-	2021	2017	50
신탄진 복합문화 커뮤니티센터 조성	33,134	-	55	15,982	17,097	2023	2019	40
중리근린공원 복합문화센터 조성	4,032	-	-	2,690	1,342	2023	2020	30

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2020년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

신탄진동 주민센터 부지매입

담당자

자치분권과 김권희(☎608-6515)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신탄진동행정복지센터 부지매입으로 효율적인 자치행정 구현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2005. 4. ~ 2024. 4.

○ 위 치 : 대전광역시 대덕구 신탄진동 120-1

○ 규 모 : 2,067.400㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,812백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,812	2,370	96	346	-
국 비
시 도 비
시군구비	2,812	2,370	96	346	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 신탄진동행정복지센터 부지매입대금 16~19회차 조기상환 완료

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

주민자치회 시범사업

담당자

공동체과 김지현(☎608-6617)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주민 스스로 지역문제를 발굴·해결할 수 있도록 주민자치회 권한과 책임을       확대하여 실질적 주민자치를 위한 기반 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019~(지속추진)

○ 위 치 : 대덕구 전체

○ 규 모 : 12개동 주민자치회 구성 및 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  907백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	907	123	240	294	250
국 비
시 도 비	801	123	240	238	200
시군구비	106			56	50
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75 %)

○ 2019년 1단계 3개동 주민자치회 구성, 주민총회 개최, 자치계획 실행

○ 2020년 2단계 9개동 주민자치회 구성 완료

○ 2021년 12개동 주민자치회 구성, 주민총회 개최, 자치계획 실행

□ 향후계획

○ 2021년 자치계획 실행(12개동)

○ 향후 지속적이고 안정적인 주민자치 사업 지원방안 마련

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 2단계 9개동 시비(특교금) 지원 확정(2020.2.26.)

○ 2021년 주민자치회 시범사업 지원 특별조정교부금 교부확정(2021.2.2.)

사업명

2020 대청호 대덕 뮤직페스티벌

담당자

문화관광체육과 최은옥(☎608-6732)

□ 사업목적 및 필요성

○ 벚꽃+ 음악+ 젊음이 조화를 이룬 중부권 최대 뮤직페스티벌

○ 타지 방문객 비율이 80%에 달하는 전국 문화 관광형 축제

□ 사업개요

○ 기 간 : 매년 4월(벚꽃 개화시즌)

○ 위 치 : 대청공원 일원

○ 규 모 : 뮤직페스티벌, 전국청소년가요제, 문화체험부스 운영 등의 프로그램으로 약 15만 명이 방문하는 대규모 축제

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 866백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	866	270	4	272	320
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	84	70	-	14	-
시군구비	782	200	4	258	320
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)

○ 포스터 제작 및 홈페이지 리뉴얼 후, 코로나19 확산으로 인한 최종 행사취소 결정

□ 향후계획

○ 대청호, 벚꽃 등 관광 콘텐츠 연계로 관광형 축제로 도약 기회 마련

○ 코로나19 확산지속 대비 비대면 축제진행방법 강구

□ 사업변경 내역

○ 코로나19의 확산 방지를 위한 2020년 대청호 대덕뮤직페스티벌 취소

사업명

2020 대코맥주페스티벌

담당자

일자리경제과 용승인(☎608-6923)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역화폐 대덕e로움의 홍보 및 직접 사용기회 제공으로 사용자 확산에 기여

○ 침체된 골목상권의 개발 및 지역상인 만의 참여 독려로 직접적인 매출증대 효과

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 7.~9월 / 12회 / 금․토 17:00~22:00

○ 위 치 : 오정·중리·송촌·비래·신탄진·석봉동 골목상권

○ 규 모 : 뮤지션 공연, 맥주페스티벌, 전국 최대 우산거리 조성, 기타 이벤트 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,194백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	1,194	288	90	408	408
국 비	90	0	90	0	0
시 도 비
시군구비	1,104	288	0	408	408
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 21%)

○ 코로나19 재확산으로 인하여 대규모 인원이 모이는 행사 개최 불가

⟹ 국비 90백만원을 대덕e로움 홍보사업비로 변경·집행

□ 향후계획

○ 2021년 권역별 분산 개최를 위한 예산확보 후, 코로나19 상황에 따라 행사 추진

□ 사업변경 내역

통계목	예산(백만원)	변 경	비 고
201-03 (행사운영비)	428 (국90,구338)	국비 : 대덕e로움 홍보비로 변경 구비 : 불용 처리	세부사업 : 지역사랑상품권 홍보지원사업(국비)-201-01

사업명

새로운 어린이공원 조성

담당자

공원녹지과 권중학(☎608-5113)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기 조성된 노후 어린이공원을 아이들이 직접 참여하고 새롭게 꾸미도록 하여 어린이들에게 꿈과 희망을 심어줄 수 있는 새로운 어린이공원 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2024.

○ 위 치 : 관내 어린이공원

○ 규 모 : 10개소 / 매년 2개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,876백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,876		407	469	3,000
국 비	0
시 도 비	2,526		199	227	2,100
시군구비	1,350		208	242	900
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ ’19. 1. ~ 5.  어린이공원 사업추진 기초자료 제출

○ ’19. 8.       새로운어린이공원 조성계획 수립, 지방재정 투사심사 의뢰

○ ’20. 1. ~ 11. 새로운어린이공원(원비래) 공원조성계획 변경 및 공사 추진

□ 향후계획

○ ’21. 1. ~ 12. 새로운어린이공원(홈통골) 공원조성계획 변경 및 공사 추진

○ ’21. ~ ’23.    보조사업 신청 및 공사 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

미세먼지 차단숲 조성사업

담당자

공원녹지과 이호연(☎608-5111)

□ 사업목적 및 필요성

○ 미세먼지, 도시열섬 현상 등 기후환경 위기 극복을 위한 숲 조성

○ 도시민의 삶의 질 개선을 위한 그린인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2023.

○ 위 치 : 산업단지 및 주요도로변 주변 유휴토지

○ 규 모 : 미세먼지 차단숲 조성 7.0ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,796백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,796	1,894	1,202	1,700	2,000
국 비	3,398	947	601	850	1,000
시 도 비	2,379	663	421	595	700
시군구비	1,019	284	180	255	300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45.5%)

○ ’18. 10.       지방재정 투사심사

○ ’19. 1. ~ 12.  대덕산업단지 미세먼지 차단숲 조성(4.0ha)

○ ’20. 1. ~ 12.  대전산업단지 미세먼지 차단숲 조성(1.4ha)

’21년도 설계비(추경) 확보 및 실시설계용역 추진(주요도로변)

□ 향후계획

○ ’21. 1. ~ 12.  주요도로변(신탄진 I.C, 갑천고속화도로) 차단숲 조성

○ ’22. ~ ’23.    미집행 도시공원(목상체육공원) 내 미입목지 차단숲 조성

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 기존 노후 산단, 도시재생사업 지역 미세먼지 발생원 주변 조성

→ (확대)생활권 내 주요 도로·철도변 녹지나 유휴지, 도심 내 일정면적 이상 유휴지로 확대 / 한국판 그린뉴딜 포함

사업명

송촌동 상점가 주차환경 개선사업

담당자

교통과 이학로(☎608-5291)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상점가 내 공영주차 전용빌딩을 건립하여 인근 상점가 주차난 해소 및 지역상권 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2020년

○ 위 치 : 대덕구 송촌동 458번지

○ 규 모 : 공영주차 전용빌딩 건립 (6,018.27 ㎡, 지하3층~지상1층) 173면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,181백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,181	5,511	3,670	0	0
국 비	4,735	2,812	1,923	0	0
시 도 비	2,043	937	1,106	0	0
시군구비	2,403	1,762	641	0	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘17. 03. : 중기부 상점가 주차환경개선사업 공모 선정

○ ‘17. 11. ~ ‘18. 12. : 실시설계 추진

○ ‘18. 11. : 지하안전영향평가, 경관위원회 심의 완료

○ ‘19. 01. : 건축공사 착공

○ ‘19. 07. : 전기, 기계, 소방, 통신공사 착공

○ ‘19. 12. : 구조물 시공 완료

○ ‘20. 03. : 공사 준공 및 시설물 이관(교통과→일자리경제과)

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

효자지구 주거환경개선사업

담당자

도시계획과 최승규(☎608-5372)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후·불량주택 밀집지역 주거환경 개선으로 주민 삶의 질 향상 도로

○ 효자지구에 기반시설 설치 및 공동주택 건설로 지역 주민 재정착 유도

□ 사업개요

○ 기 간 : 2007년 ~ 2026년

○ 위 치 : 대덕구 읍내동 240번지 일원

○ 규 모 : 기반시설 설치 / 도로(L=1,060m, B=4~20m) 개설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,396백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	11,396	5,196	928	2,000	3,272
국 비	2,598	2,598	-	-	-
시 도 비	7,499	1,299	928	2,000	3,272
시군구비	1,299	1,299	-	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ `19. 04. : 공동사업시행자 협약 체결(LH↔민간컨소시엄)

○ `20. 04. : 주거환경개선사업 보조금(시비 928백만원) 추가 확보

○ `21. 04. : 정비계획(변경) 결정 및 정비구역 지정 고시

○ `21. 05. : 사업시행계획 인가 신청

□ 향후계획

○ `21. 하반기 : 사업시행계획 인가

○ `22. ~ ‘24. : 보상 및 공사 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

장동(욕골)지구 주거환경개선사업

담당자

도시계획과 백태일(☎608-5374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 열악한 도시기반시설 정비를 통해 주민 삶의 질 향상 도모

○ 주거환경 개선으로 자연과 공존하는 친환경 정주여건 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2020년

○ 위 치 : 대덕구 장동 344-5번지 일원

○ 규 모 : 도로 3개소(L=535m, B=6~10m) 및 주차장 4개소(N=90면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  7,808백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	7,808	6,977	768	-	-
국 비	3,829	3,821	328	-	-
시 도 비	2,239.5	1,744	480	-	-
시군구비	1,739.5	1,739		-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `15. 11. : 정비계획 결정 및 정비구역 지정 고시(市)

○ `16. 10. : 사업시행계획 인가(區)

○ `18. 04. : 기반시설공사 1차분 (도로2개소 및 주차장4개소) 착공

○ `18. 09. : 기반시설공사 1차분 (도로2개소 및 주차장4개소) 준공

○ `19. 08. : 기반시설공사 2차분 (도로1개소) 착공

○ `20. 12. : 기반시설공사(도로1개소(L=307, B=5.0m)) 준공

□ 향후계획

○ 잔액반납

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

장동욕골지구 새뜰마을사업

담당자

도시계획과 백태일(☎608-5374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 부족한 지역 기반시설 확충으로 주민 삶의 질 향상 도모

○ 마을공동체 활성화 및 마을기업 지원 등을 통한 주민 역량 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2020년

○ 위 치 : 대덕구 장동 344-5번지 일원

○ 규 모 : 주민역량강화사업, 공동홈 조성, LPG배관망 설치 및 인프라 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,983백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2021년 이후
계	3,983	3,619	146	-	-
국 비	2,807	2,559	100	-	-
시 도 비	354	319	14	-	-
시군구비	822	741	32	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `15. 04. : 취약지역 생활여건 개조 프로젝트 공모사업 선정

○ `15. 12. : 마스터플랜 수립 및 실시설계

○ `16. 06. : LPG배관망 구축사업 실시

○ `16. 12. : 공동홈 조성사업 실시

○ `17. 12. : 주민역량강화 용역 실시

○ `18. 04. : 셉테드 사업(1차분) 실시

○ `20. 01. : 공공공지 조성 및 셉테드 사업(2차분, 전기) 착공

○ `20. 12. : 공공공지 조성 및 셉테드 사업(2차분, 전기) 준공

□ 향후계획

○ 잔액반납

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

장동~상서 도로개설사업

담당자

도시계획과 홍종우(☎608-5373)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장동 ~ 상서 간 도로개설로 개발규제로 피해를 받고 있는 공여구역 주변지역 지역민에 대한 정주여건 개선 및 주민통행불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018.  1. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 대덕구 장동 370-2번지 ~ 상서동 54-2번지

○ 규 모 : 도로개설 L=1.6km, B=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2021년 이후
계	8,000	756	2,644	200	4,400
국 비	4,000	326	1,374	100	2,200
시 도 비	2,000	215	635	50	1,100
시군구비	2,000	215	635	50	1,100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ `19.03. ~ `20.05. : 주민설명회 실시(총 3회)

○ `20. 11. : 사업시행계획 승인

○ `21. 08. : 공사 착공

□ 향후계획

○ `21.10. ~ `22.10. : 보상추진

○ `21.08. ~ `23.12. : 공사 착공 및 준공

사업명

용호교 개량사업

담당자

건설과 홍광의(☎608-5212)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관내 교량 안전점검 용역 실시 결과에 따른 안전등급“D”등급으로 긴급한 보수보강 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 11. ~ 2021. 9.

○ 위 치 : 대청로 251 일원

○ 규 모 : 교량보수보강 1식(L=40m, B=10m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 850백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	850	-	38	812	-
국 비
시 도 비
시군구비	850	-	38	812	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 1975. 12. 20. : 용호교 준공

○ 2017.  3. ~  9. : 관내 도로시설물(교량) 내진성능평가 용역 추진

○ 2017. 10.     : 구 투자심사 절차 이행

○ 2018. 11. 12. : 기존 설계도서 보완용역 착수

○ 2019.  3. 5. : 용역 일시정지 / 사유 : 공법 재검토 및 주민의견 수렴 등

○ 2020.  6. 23. : 용역 준공

○ 2020. 10.  7. : 교량 신설사업비 확보 지난에 따른 사업계획 변경

- 확보된 예산범위 내 보수보강(내진설계 포함 등) 추진

○ 2020. 10.     : 보수보강 공법선정위원회 개최

○ 2020. 12. 07. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2021.  9. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ (당초) 총사업비 4,800백만원 → (현재) 총사업비 850백만원

사업명

신탄진 복합문화 커뮤니티센터 조성

담당자

공공청사과 김문선(☎608-5192)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문화소외 지역 복합문화커뮤니티센터 조성으로 주민 중심의 정주여건

개선과 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020.1 ~ 2023.6

○ 위 치 : 대전광역시 대덕구 석봉동 774번지

○ 규 모 : 지하 2층, 지상 3층, 연면적 12,639.36㎡ / 부지 5,400㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 33,134백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	33,134		55	15,982	17,097
국 비	9,268		55	5,774	3,439
시 도 비	9,869			2,293	7,576
시군구비	13,997			7,915	6,082
지 방 채
민간자본

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2020.1 ~ 2021. 6 설계공모, 설계용역 완료

- 공유재산관리계획변경승인, 교통영향평가, 지구단위계획 변경, 멸종위기 야생동물 맹꽁이 포획이전 허가, 건설기술심의 등

○ 2020.7 : 계약심사 및 일상감사

□ 향후계획

○ 2021. 10 공사 착공

○ 2023.  6 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

구 분	당 초	변 경	비고
사 업 비	37,700백만원 ※ 42,300백만원(공유재산 포함)	33,134백만원	12%
사업기간	2020 ~ 2022	2020 ~ 2023

사업명

중리근린공원 복합문화센터건립

담당자

공공청사과 박장규(☎608-5193)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활soc 복합화로 지역주민의 문화·평생교육 및 문화향유 제공

○ 정주환경 개선과 주민 삶의 질 향상 및 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021.12 ~ 2023.6

○ 위 치 : 대전광역시 대덕구 중리동 388-17번지

○ 규 모 : 지하 1층/지상 2층, 연면적 1,945㎡, 부지 10,322㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,032백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,032			2,690	1,342
국 비	2,112			1,300	812
시 도 비	886			695	191
시군구비	1,034			695	339
지 방 채
민간자본

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 용역수행 30%)

○ 2021. 5. ~ 2021. 10. 설계용역

- 공원조성변경계획 접수

□ 향후계획

○ 2021. 10 설계용역 준공

○ 2021. 12 공사 계약 및 착공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당 없음

10-2. 지방채 발행사업 : 해당 없음

10-3. 민간투자사업 : 해당 없음