109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 대덕구에서 ‘21년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후
신탄진동동청사 부지매입	345	0	345	0	0	2021	2020	100
주민자치회 시범사업	571	363	208	-	-	2021	2019	100
2021 대청호 대덕뮤직페스티벌	1174	274	272	314	314	계속	2021	100
2021 대청호가 그린 영화제	226	0	0	113	113	계속	2021	100
2021 대코맥주 페스티벌	1,218	378	62	350	428	2021	2021	30
민관협력 중소벤처 스마트혁신지구 조성사업	10,500	-	6,500	4,000	-	2023	2021	35
새로운 어린이 공원조성	1,296	407	451	438	0	2022	2019	66.2
미세먼지차단숲 조성	5,615	3,096	1,580	469	470	2023	2018	83.2
효자지구 주거환경 개선사업	11,396	6,124	2,000	3,272	0	2026	2019	50
장동~상서 도로개설사업	8,000	3,411	227	2,676	1,686	2024	2020	20
용호교 개량사업	870	38	801	-	-	2021	2017	100
신탄진 복합문화 커뮤니티센터 조성	33,134	8,741	10,759	13,634	0	2023	2019	30
중리근린공원 복합문화센터 조성	5,610	0	747	4,863	0	2023	2020	23

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2021년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

신탄진동 동청사 부지매입

담당자

자치분권과 김현규(☎608-4263)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신탄진도시재생 어울림 플랫폼 조성사업의 일환으로 기존 신탄진동 행정복지센터 철거 후 신축 공사 추진(신탄진 드림타운 다가온)

○ 이에 따라, 신탄진 드림타운 다가온 건축 사업의 원활한 추진을 위해 동청사 부지에 대한 매입 분할 납부대금 조기상환 및 소유권 등기 이전 필요(기획재정부 → 대덕구)

구분(소유권)	소재지	면적	국유재산 매입 현황
국유재산 (기획재정부)	신탄진동 120-1	2067.4㎡	· 2005년 매매계약 · 20회차(2005∼2024) 분할 납부

□ 사업개요

○ 일    정 : ‘21. 1월

○ 내    용 : 신탄진동청사 부지매입비 조기상환(2021~2024, 4회차분)

○ 매입부지 : 신탄진동 120-1 / 前 신탄진동 행정복지센터 부지

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 345백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	345	0	345	0	0
국 비	해 당 없음
시 도 비
시군구비	345	0	345	0	0
지 방 채	해 당 없 음
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 부지 매입비 납부(한국자산관리공사) / ’21. 1월

○ 소유권 등기 이전(기획재정부 → 대덕구) / ‘21. 1월

□ 향후계획

○ 공유재산(토지, 건물) 관리 철저

사업명

주민자치회 시범사업

담당자

공동체과 김지현(☎608-6617)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주민 스스로 지역문제를 발굴·해결할 수 있도록 주민자치회 권한과 책임을       확대하여 실질적 주민자치를 위한 기반 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2021

○ 위 치 : 대덕구 전체

○ 규 모 : 12개동 주민자치회 구성 및 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 571백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	571	363	208	-	-
국 비
시 도 비	363	363	-	-	-
시군구비	208	-	208	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019년 시범 1단계 3개동 주민자치회 구성, 주민총회 개최, 자치계획 실행

○ 2020년 시범 2단계 9개동 주민자치회 구성 완료, 주민자치회 全 洞 추진,

의제발굴 및 주민총회 개최, 자치계획 실행

○ 2021년 12개동 주민자치회 운영, 주민총회 개최, 자치계획 실행

□ 향후계획

○ 주민자치력 강화를 통한 순수한 주민역량으로 주민자치 활성화

○ 자주재원 확충을 통한 사업추진 및 지속가능한 주민자치회 운영

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

대청호대덕뮤직페스티벌

담당자

문화관광체육과

김현진(☎608-6732)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대덕구의 대표 관광지인 대청공원에서 펼쳐지는 대덕구 대표축제 개최로       대덕구의 브랜드 가치 향상 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 4월

○ 위 치 : 대청공원

○ 규 모 : 10만명 온라인 참여 / 라이브공연, 버스킹, 청소년가요제, 뮤직토크콘서트 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,174백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	1,174	274	272	314	314
국 비
시 도 비	114	70	14	15	15
시군구비	1,060	204	258	299	299
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2021 대청호대덕뮤직페스티벌 온라인 개최

□ 향후계획

○ 대청호, 벚꽃 등 관광 콘텐츠 연계로 관광형 축제 도약

□ 사업변경 내역

○ 대청호대덕뮤직페스티벌 온라인(비대면) 축제로 변경 개최

사업명

대청호가 그린 영화제

담당자

문화관광체육과

김현진(☎608-6732)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대덕구의 대표 관광지인 대청공원에서 영화를 매개로한 문화예술형

축제개최로 지역민의 문화향유 기회 확대 및 문화예술 관광 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 11월

○ 위 치 : 대청공원

○ 규 모 : 1,000여명 / 사전신청 인원 등(코로나19로 인한 인원제한)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 226백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	226	0	0	113	113
국 비
시 도 비	26			13	13
시군구비	200	0	0	100	100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 전액 민간 후원금으로 축제 개최 / 수자원공사

□ 향후계획

○ 생태관광자원과 영화를 연계한 대덕구 대표 문화예술 축제 조성

사업명

2021 대코맥주페스티벌

담당자

일자리경제과 박혜진(☎608-6924)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역화폐 대덕e로움의 홍보 및 직접 사용기회 제공으로 사용자 확산에 기여

○ 침체된 골목상권의 개발 및 지역상인 만의 참여 독려로 직접적인 매출증대 효과

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 7.~9월 / 12회 / 금․토 17:00~22:00

○ 위 치 : 오정·중리·송촌·비래·신탄진·석봉동 골목상권

○ 규 모 : 뮤지션 공연, 맥주페스티벌, 우산거리 조성, 라디오dj박스 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,218백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	1,218	378	62	350	428
국 비	90	90	0	0	0
시 도 비
시군구비	1,128	288	62	350	428
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  15 %)

○ 코로나19 장기화로 대규모 인원이 모이는 행사 개최 불가

⇒ 2021년 대코맥주페스티벌 전면 취소

○ 사업목적 및 예산과목이 동일한 라이브커머스 사업으로 대체 추진

⇒ 대세라이브커머스 집행 : 62백만원

□ 향후계획

○ 2022년 대덕거리 맥주페스티벌로 명칭 변경 후 권역별 분산 개최

⇒ 2022. 7월 기준 비래·신탄진동 개최 完

○ 코로나19 재확산 상황에 따라 정부 지침에 준수하며 중리·송촌·석봉·목상동 행사 추진

□ 사업변경 내역

통계목	예산(백만원)	변 경	비 고
201-03 (행사운영비)	408	라이브커머스 대체 추진 : 62백만원 잔액 불용 처리

사업명

민관협력 중소벤처 스마트혁신지구 조성사업

담당자

일자리경제과 김아름(☎6481)

□ 사업목적 및 필요성

○ 「2021 민관협력 중소벤처 스마트혁신지구 조성사업」(중기부) 공모선정

○ 낙후공업지역의 활성화 및 경쟁력 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2022년(예정)

○ 위 치 : 대덕구 평촌동 142-1

○ 규 모 : 토지 2,413㎡, 건축물 연면적 1,420㎡(2개동)

○ 내 용 : 부지 매입 및 스마트플랫폼 조성(공동활용공간, 인프라, 교육장, 회의실 등)

○ 사업수행 : (재)대덕경제재단

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,500	0	6,500	4,000	0
국 비	4,000	0	2,000	2,000	0
시 도 비	5,300	0	3,900	1,400	0
시군구비	1,200	0	600	600	0
지 방 채
민간자본
기 타

※ 스마트혁신지구 조성 이후 운영비 매년 2억원 소요 예정

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 사업부지(토지 및 건물) 공유재산 취득 완료(‘21. 12.)

○ 스마트혁신지구 기계장비 자문단 구성(‘22. 1.)

○ 활용공간고도화 및 기업네트워크 구축 용역 추진(‘22. 3. ~ 7.)

○ 조성사업비 교부(대덕경제재단, ‘22. 6.)

○ 건축물 석면 해체·제거 공사완료(‘22. 6.)

○ 스마트플랫폼 건축 기본설계 용역 입찰(‘22. 8.)

□ 향후계획

○ 건축 실시설계 용역 착수 및 인허가 등 행정절차

○ 장비구입 계획 및 구입 추진

○ 건축공사 추진

사업명

새로운 어린이 공원조성

담당자

공원녹지과

김원섭(☎042-608-5113)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기 조성된 노후 어린이공원을 아이들이 직접 참여하고 새롭게 꾸미도록 하여       어린이들에게 꿈과 희망을 심어줄 수 있는 새로운 어린이공원 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2022.

○ 위 치 : 관내 어린이공원

○ 규 모 : 3개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,296백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	1,296	407	451	438	0
국 비
시 도 비	635	199	221	215	0
시군구비	661	208	230	223	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ’19. 1. ~ 5.  어린이공원 사업추진 기초자료 제출

○ ’19. 8.       새로운어린이공원 조성계획 수립, 지방재정 투사심사 의뢰

○ ’20. 1. ~ 11. 새로운어린이공원(원비래) 공원조성계획 변경 및 공사 추진

○ ’21. 1. ~ 10. 새로운어린이공원(홈통골) 공원조성계획 변경 및 공사 추진

□ 향후계획

○ ‘22. 1. ~ 8 새로운어린이공원(진가쟁이) 공원조성계획 변경 및 공사 추진

사업명

미세먼지 차단숲 조성사업

담당자

공원녹지과

김원섭(☎042-608-5113)

□ 사업목적 및 필요성

○ 미세먼지 저감, 도심 열섬화 완화 및 생활환경 개선을 위한 그린 인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2023.

○ 위 치 : 산업단지 및 주요도로변 주변 유휴토지, 목상체육공원

○ 규 모 : 미세먼지 차단숲 조성 10ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,615백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,615	3,096	1,580	469	470
국 비	2,808	1,548	790	235	235
시 도 비	1,966	1,084	553	164	165
시군구비	841	464	237	70	70
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 83.2%)

○ ’18. 10.       지방재정 투사심사

○ ’19. 1. ~ 12.  대덕산업단지 미세먼지 차단숲 조성(4.0ha)

○ ’20. 1. ~ 12.  대전산업단지 미세먼지 차단숲 조성(1.4ha)

○ ’21. 1. ~ 12.  신탄진I.C 및 갑천고속화도로 교통광장 미세먼지 차단숲 조성 (2.4ha)

○ ’22. 1. ~ 6.  목상체육공원 미입목지 미세먼지 차단숲 조성(1.3ha)

□ 향후계획

○ ’23.  미집행 도시공원(목상체육공원) 내 미입목지 차단숲 조성

사업명

효자지구

주거환경 개선사업

담당자

도시계획과

최승규(☎608-5372)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 노후‧불량주택 밀집지역의 기반시설의 정비 및 주거환경 개선

◦ 쾌적하고 편리한 주거 공간 확충으로 주민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2007년 ~　2026년

○ 위 치 : 읍내동 240번지 일원

○ 규 모 : 도로 B=4∼20m, L=1,060m, 공원조성 A=5,778㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  11,396 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	11,396	6,124	2,000	3,272	0
국 비	2,598	2,598	0	0	0
시 도 비	7,499	2,227	2,000	3,272	0
시군구비	1,299	1,299	0	0	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ `07. 3.: 정비계획 수립 및 정비구역 결정고시

○ ‘21. 04. 07. : 정비계획(변경) 결정 및 정비구역 지정 고시(市)

○ ‘21. 05. 18. ~ 現. : 시행계획 관련 주민공람 등 행정절차 이행

□ 향후계획

○ `22. 08. : 사업시행계획인가

○ `22. 12. : 보상계획공고

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

장동∼상서 도로개설사업

담당자

도시계획과

이종무(☎608-6873)

□ 사업목적 및 필요성

○ 그동안 개발규제로 피해를 받고 있는 장동, 상서동 일원 주한미군 공여구역 주변지역에 대한 정주여건 개선 및 통행불편 해소 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 대전광역시 대덕구 장동 산116-1번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=1.08km, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	8,000	3,411	227	2,676	1,686
국 비	3,999	1,705	113	1,057	1,124
시 도 비	2,000	853	57	528	562
시군구비	2,001	853	57	1,091	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 도로개설공사 계약 및 착공(1차분) / 파크종합건설

○ 손실보상협의 추진 중(1차분)

□ 향후계획

○ `22. 8. ~ `23. 5. : 1차분 공사 추진

○ `22. 12. ~ `24. 12. : 2차분 공사 추진

사업명

용호교 개량사업

담당자

건설과 최무선(☎608-5212)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관내 교량 안전점검 용역 실시 결과에 따른 안전등급 “D”등급으로 긴급한 보수보강 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 11. ~ 2021. 11.

○ 위 치 : 대청로 251 일원

○ 규 모 : 교량 보수보강 1식(L=40m, B=10m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 870백만원 / 총집행액 : 839백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	839	38	801	-	-
국 비
시 도 비
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타	839	38	801	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 1975. 12. 20. : 용호교 준공

○ 2017. 03. ~  09. : 관내 도로시설물(교량) 내진성능평가 용역 추진

○ 2017. 10.     : 구 투자심사 절차 이행

○ 2018. 11. 12. : 기존 설계도서 보완용역 착수

○ 2020. 06. 23. : 용역 준공

○ 2020. 10. 07. : 교량 신설사업비 확보 지난에 따른 사업계획 변경

- 확보된 예산범위 내 보수보강(내진설계 포함 등) 추진

○ 2020. 12. 07. : 공사 착공

○ 2021. 11. 26. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ (당초) 총사업비 4,800백만원 → (변경) 총사업비 870백만원

사업명

신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립

담당자

공공청사과 정일권(☎608-5192)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신탄진권역 주민들의 삶의 질 향상 및 정주여건 개선을 위한 문화․복지․공공시설 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 01. ~ 2023. 08.

○ 위 치 : 대덕구 석봉동 774번지(면적 : 5,400㎡) / 주차 127면

* 2종일반주거지역, 지구단위계획구역 (구)풍한방직 이전적지 도시-개발사업)

○ 규 모 : 연면적 12,639.36㎡ / 지하2층, 지상1층

층별	지2층	지1층	1층	2층	3층	지붕
조성 시설	￭ 주 거 지 주 차 장	￭ 부설주차장 ￭ 기계․전기실	￭ 행정복지센터 1,284.70 ￭ 주민건강센터 950.09 ￭ 로컬푸드직매장 401.71	￭ 도서관	￭ 생활문화센터 1,212.63 ￭ 국민체육센터 766.18	￭ 공조실
12,639.36	2,970.41	2,712.39	2,636.50	2,308.82	1,978.81	32.43

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 33,134백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	33,134	8,741	10,759	13,634	-
국 비	8,568	2,756	3,056	2,756	-
시 도 비	9,869	1,223	1,078	7,568	-
시군구비	13,097	4,762	5,925	2,410	-
특별교부세	700		700		-
특별조정교부금	900			900	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2021. 11. 10. : 공사 착공 / 2021. 11. 25. : 기공식 / 2023. 8. 1. : 준공

○ 2022. 02. 14. : 새로운(新) 사업명칭 공모

○ 2022. 04. 12. : 계속 계약사업 2차 공사 계약

□ 향후계획

○ 2022. 10. 05. : 계속 사업 1차 계약 공사 준공

○ 2023. 08. 01. : 총차분 준공(공사완료)

사업명

중리근린공원 복합문화센터 건립

담당자

공공청사과 박장규(☎608-5193)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활SOC 복합화로 지역 주민의 문화‧평생교육‧문화향유 기회 제공으로       주민 삶의 질 향상 및 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 01. ~ 2023. 05.

○ 위 치 : 대덕구 중리동 388-17번지(중리근린공원 내)

○ 규 모 : 연면적 2,231.18㎡ / 지하1층, 지상2층

층 별	지하1층	지상1층	지상2층
조성시설	￭ 주 차 장(19면) ￭ 기 계 실	￭ 생활문화센터(645㎡) ￭ 작은 도서관(110㎡)	￭ 국민체육센터(750㎡)
2,231.18	725.76	755.71	749.71

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,610백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,610	0	747	4,863
국 비	2,062	0	399	1,663
시 도 비	834	0	174	660
시군구비	1,314	0	174	1,140
특별조정교부금	1,000	0		1,000
특별교부세	400	0		400
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 23%)

○ 2021. 12. 27. : 공사 착공

○ 2022. 07. 19. : 1차 설계변경 (증 202백만원)

□ 향후계획

○ 2022. 10. 05. : 1차분 준공

○ 2023. 05. 05 : 총차분 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : 당초)지상3층/1,950㎡ → 변경)지하1층,지상2층/2,231㎡,

○ 총사업비 : 당초)4,032백만원 → 변경)5,610백만원

10-2. 지방채 발행사업 : 해당 없음

10-3. 민간투자사업 : 해당 없음