109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 대덕구에서 ‘22년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후
효자지구 주거 환경개선사업	11,396	8,124	3,272	-	-	2027	2019	60
장동~상서간 도로개설사업	8,000	5,307.5	1,006.5	843	843	2024	2020	25
새로운 어린이공원 조성	4,858	1,798	430	1,730	900	2024	2019	40
중리근린공원복합문화센터조성	5,870	746	2,532	2,592	-	2023	2020	100
신탄진 복합문화 커뮤니티센터 조성	34,134	4,156	7,214	22,764	-	2023	2019	60
2022 대청호가 그린 영화제	100	-	100	-	-	2022	2021	100
2022 대청호 뮤직페스티벌	1,131	288	276	267	300	지속	2020	100
회덕다목적 체육센터 건립	4,800	-	-	200	4,600	2024	2022	30
민관협력 중소벤처 스마트혁신지구 조성사업	10,700	6,500	4,000	0	200	2023	2021	60
2022 대코맥주 페스티벌	1,843	440	354	499	550	2024	2020	43
안산도서관 리모델링	3,440	-	18	1,080	2,342	2024	2022	40
신청사 건립	120,000	75	92	2,000	117,833	2026	2022	0.06

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2022년에 추진한 사업

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

효자지구 주거 환경개선사업

담당자

도시계획과 박호준 (☎608-5372)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후‧불량주택 밀집지역의 기반시설의 정비 및 주거환경 개선

○ 쾌적하고 편리한 주거 공간 확충으로 주민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2007년 ～ 2027년

○ 위 치 : 대전광역시 대덕구 읍내동 240번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 : B=4∼20m, L=1,060m / 공원조성 : A=5,778㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,396백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	11,396	8,124	3,272
국 비	2,598	2,598
시 도 비	7,499	4,227	3,272
시군구비	1,299	1,299
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ `07. 03. : 정비계획 수립 및 정비구역 결정고시

○ ‘21. 04. 07. : 정비계획(변경) 결정 및 정비구역 지정 고시(市)

○ ‘22. 08. 26. : 사업시행계획인가

□ 향후계획

○ `23. 08. : 보상계획공고

○ `23. 11. : 손실보상협의 시행

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

회덕동(장동)~상서간 도로개설사업

담당자

도시계획과 조연희☎608-5373)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주한미군 공여구역으로 낙후된 주변 지역의 경제 진흥 도모

○ 지역 간 균형 있는 발전과 주민의 복리 증진 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ～ 2024년

○ 위 치 : 대전광역시 대덕구 회덕동(장동) ~ 상서동 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=1.08km, B=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,000	5,307.5	1,006.5	843	843
국 비	4,000	2,205	671	562	562
시 도 비	2,000	1,102.5	335.5	281	281
시군구비	2,000	2,000	-	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ `20. 11. 27. : 사업시행계획 승인 및 지형도면 고시(區)

○ `21. 10. 12. : 공사 착공(1차분)

○ ‘21. 12. 15. : 보상계획공고(1차분)

○ `22. 11. 30. : 공사 착공(2차분)

○ ‘23. 02. 10. : 보상계획공고(2차분)

□ 향후계획

○ `23. 10. : 공사(1차분) 준공

○ `24.  3. : 공사(3차분) 착공

○ `24. 12. : 공사(2, 3차분) 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

새로운 어린이 공원조성

담당자

공원녹지과 김원섭(☎608-5113)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후어린이공원 재조성을 통해 이용객 만족도 제고

□ 사업개요

○ 기 간 :  2020. ~ 2024.

○ 위 치 :  관내 노후 어린이공원

○ 규 모 :  10개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,858백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,858	1,798	430	1,730	900
국 비
시 도 비	2,206	420	211	945	630
시군구비	2,652	1,378	219	785	270
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2020년 : 원비래어린이공원 재조성 사업 완료

○ 2021년 : 홈통골, 새뜸어린이공원 재조성 사업 완료

○ 2022년 : 진가쟁이어린이공원 재조성 사업 완료

□ 향후계획

○ 2023년

- 1 ~ 5월 : 새말어린이공원 재조성 사업 추진

- 8 ~ 11월 : (통매바위,다정,여태말어린이공원) 재조성 사업 추진

사업명

중리근린공원 복합문화센터 건립

담당자

공공청사과 박종현(☎608-5193)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활SOC 복합화로 지역 주민의 문화‧평생교육‧문화향유 기회 제공으로       주민 삶의 질 향상 및 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 01. ~ 2023. 06

○ 위 치 : 대덕구 중리동 388-17번지(중리근린공원 내)

○ 규 모 : 연면적 3,098.47㎡ / 지하1층, 지상2층

층별	지하 1층	지상 1층	지상 2층
조성시설	￭ 주 차 장(41면) ￭ 기 계 실	￭ 생활문화센터 ￭ 작은 도서관	￭ 국민체육센터

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,870백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,870	746	2,532	2,592
국 비	2,062	482	1,102	478
시 도 비	834	132	597	105
시군구비	1,574	132	698	744
특별교부세	400		105	295
특별조정교부금	1000		30	970

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2021. 12. 28. : 공사착공

○ 2021. 12. 31. : 공사 일시중지 (한전주 및 통신주 이설)

○ 2022. 02. 07. : 공사중지 해체 및 재착공

○ 2023. 06. 26. : 준공

□ 향후계획

○ 2023. 09. : 복합문화센터 개관

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : 당초)지상3층/1,950㎡ → 변경)지하1층,지상2층/3,098㎡

○ 총사업비 : 당초)4,032백만원 → 변경)5,870만원

사업명

신탄진권역 복합문화커뮤니티센터 건립

담당자

공공청사과 심세라(☎608-5192)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신탄진권역 주민들의 삶의 질 향상 및 정주여건 개선을 위한 문화·복지·공공시설 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 10.

○ 위 치 : 대덕구 석봉동 774번지

○ 규 모 : 연면적 12,639.36㎡, 지하2/지상3층, 철근콘크리트조 및 철골조

층별	지하 2층	지하 1층	지상 1층	지상 2층	지상 3층	지붕
조성시설	￭ 주 거 지 주 차 장	￭ 부설주차장 ￭ 기계․전기실	￭ 행정복지센터 ￭ 주민건강센터 ￭ 로컬푸드직매장	￭ 도서관	￭ 생활문화센터 ￭ 국민체육센터	￭ 공조실

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 34,134백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	34,134	4,156	7,214	22,764	-
국 비	8,568	2,723	1,665	4,180	-
시 도 비	9,869	526	1,037	8,306	-
시군구비	14,097	886	4,512	8,699	-
특별교부세	700	21		679	-
특별조정교부금	900	-		900	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2021. 11. 10. : 공사착공

○ 2022. 04. 12. : 계속계약사업 2차 공사계약

○ 2022. 09. 26. : 공사기간연장(60일)

○ 2023.1.2.~1.31. : 동절기 공사 일시정지(30일)

○ 2023. 02. 01. : 재착공

○ 2023. 7월 내부 조적공사 중 / 공정률 60%

□ 향후계획

○ 2023. 10. 30. : 준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초)33,134백만원 → 변경)34,134백만원

○ 공사기간 : 당초)2021.11.10.~2023.08.01. → 변경)2021.11.10.~2023.10.30.

사업명

2022 대청호가 그린 영화제

담당자

문화관광체육과 현수영(☎608-6732)

□ 사업목적 및 필요성

○ 목 적 : 구 대표 관광자원인 대청호반에서 영화를 매개로 한 영화제를 개최함으로써 지역관광 활성화 및 문화예술 브랜드 강화

○ 필요성 : 지역문화예술 네트워크 연계를 통한 문화인프라 조성, 관광활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 5. ~ 10. / 공모 기간 등 포함

※ 영화제 기간 : 2022. 9. 30.(금) ~ 10. 2.(일) / 3일간

○ 위 치 : 대청공원 및 대청문화전시관

○ 규 모 : 영화 289편 접수, 2,000여 명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	100	-	100	-	-
국 비
시 도 비
시군구비	100		100
지 방 채
민간자본
기 타

※ 제1회 대청호가 그린 영화제 비예산 추진 : 후원금 64백만원(한국수자원공사 등)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 영화제 공모(289편), 시상, 개․폐막식, 영화상영, 공연 등 추진 완료

□ 향후계획

○ 미실시 / 향후 대덕물빛축제와 연계 등으로 소규모 영화 관람 등 추진 예정

사업명

2022 대청호 뮤직페스티벌

담당자

문화관광체육과 현수영(☎608-6732)

□ 사업목적 및 필요성

○ 목 적 : 코로나19 극복과 일상회복에 따라 아름다운 생태관광지인 대청호에서 자연·사람·음악이 함께하는 치유와 힐링의 축제 개최

○ 필요성 : 지역경제 활성화, 우수지역 관광 명소화 등

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 9. 16.(금) ~ 9. 18.(일) / 3일간

○ 위 치 : 대청공원

○ 규 모 : 100,000여 명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 276백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,131	288	276	267	300
국 비
시 도 비	29	14	15
시군구비	1,092	264	261	267	300
지 방 채
민간자본
기 타	10	10

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 생태음악캠핑, 전국청소년가요제, 대청호뮤직페스티벌 등 실시 완료

○ 기타 체험, 홍보부스 등 연계추진 완료

□ 향후계획

○ 대덕물빛축제와 연계한 참신한 뮤직페스티벌 개최로 관광형 축제 도약

○ 뮤지션 라인업 강화로 지역 고유의 차별화된 음악축제로 이미지 구축

사업명

회덕다목적체육센터 건립

담당자

문화관광체육과 이태희(☎608-6272)

□ 사업목적 및 필요성

○ 계절과 날씨에 구애받지 않고 이용할 수 있는 실내체육시설 건립을 통한 지역주민의 건강 및 건전한 여가활동 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2024년

○ 위 치 : 대전광역시 대덕구 읍내동 517-12번지 외 1

○ 규 모 : 연면적 1,500㎡ (지상 3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,800	0	0	200	4,600
국 비	1,900	0	0	200	1,700
시 도 비	2,100	0	0	0	2,100
시군구비	800	0	0	0	800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2023. 4. : 건축전문위원회(건축계획) 심의 완료

○ 2023. 5. : 지적측량 및 지반조사 완료

○ 2023. 7. : 기본 및 중간설계 용역 완료

□ 향후계획

○ 2023. 7. : 실시설계용역 발주

○ 2023. 12. : 공사 발주

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 변경: 당초 38억 → 현재 48억원(증10억원 / 물가상승분 반영)

- 평당 적용단가 840만원 → 최소 1,100만원

사업명

민관협력 중소벤처 스마트혁신지구 조성사업

담당자

경제과 김아름(☎6481)

□ 사업목적 및 필요성

○ 「2021 민관협력 중소벤처 스마트혁신지구 조성사업」(중기부) 공모선정

○ 낙후공업지역의 활성화 및 경쟁력 강화

□ 사업개요

○ (기    간) 2021년 ~ 2023년(예정)

○ (위    치) 대덕구 평촌동 142-1

○ (규    모) 토지 2,413㎡, 건축물 연면적 1,556㎡(2개동)

○ (내    용) 부지 매입 및 스마트플랫폼 조성(공동활용공간, 인프라, 교육장, 회의실 등)

○ (사업수행) (재)대덕경제재단

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ (총사업비) 10,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,700	6,500	4,000		200
국 비		2,000	2,000
시 도 비		3,900	1,400
시군구비		600	600		200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 사업부지(토지 및 건물) 공유재산 취득 완료(`21. 12.)

○ 건축물 석면조사 및 해체·제거(`22. 6.)

○ 공용장비(1차) 입찰 및 계약/대형기계 6종(`22. 11.)

○ 건축물 해체공사 및 경관심의 완료(`23. 2.)

○ 건축설계 용역완료 및 건설사업관리계획 수립(`22. 5.)

○ 공용장비(2차) 입찰 및 계약/연구장비 6종(`23. 6.)

○ 건축공사 착공(`23. 8.)

□ 향후계획

○ 신축공사 진행(`23. 8.~)

○ 추가 건축비 소요분 예산편성/시, 구비 (`23. 9.~)

○ 공장동 준공 및 장비설치 등 인프라 조성(`23. 12.)

사업명

2022 대코맥주페스티벌

담당자

경제과 김용성(☎6923)

□ 사업목적 및 필요성

○ 침체된 골목상권의 개발 및 지역상인 만의 참여 독려로 직접적인 매출증대 효과

□ 사업개요

○ (기   간) 2022. 7. ~ 9. / 12회 / 금․토 17:00 ~ 22:00

○ (위   치) 중리·송촌·비래·신탄진·석봉·목상동 골목상권

○ (규   모) 뮤지션 공연, 맥주페스티벌, 우산거리 조성, 라디오dj박스 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ (총사업비) 1,843백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,843	440	354	499	550
국 비	90	90	0	0	0
시 도 비
시군구비	1,753	350	354	499	550
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  15 %)

○ 코로나19 장기화로 대규모 인원이 모이는 행사 개최 불가

⇒ 2021년 대코맥주페스티벌 전면 취소

○ 사업목적 및 예산과목이 동일한 라이브커머스 사업으로 대체 추진

⇒ 대세라이브커머스 집행 : 62백만원

○ 2022년 상권활성화를 목적으로 축제명칭 변경 추진 : 2022대덕거리 맥주페스티벌

⇒ 2022년 집행 : 354백만원

□ 향후계획

○ 2023년 대덕거리 맥주페스티벌 잠정연기

⇒ 기상상황 등 여건 악화로 추진 난항

○ 2023. 9월 중 재추진 또는 취소 / 취소 시 상권활성화 지원(소비촉진 이벤트) 등 대체

사업명

안산도서관 리모델링

담당자

도서관운영과 표진권 (☎608-5562)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후(1994년 개관) 도서관 시설로 주민들의 시설 개선 요구 증가로 쾌적한 독서문화환경조성 및 생활문화 공간 확충 등 역할 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 09. ~ 2024. 09.

○ 위 치 : 대덕구 계족로663번길 25(법동, 안산도서관)

○ 규 모 : 건축연면적 2,743.75㎡(본관 2,481.85㎡ / 별관 261.9㎡)

－ 본관 수직증축(799.85㎡), 커뮤니티 공간 조성 및 편의시설(E/V) 확충

－ 생활문화센터 조성(별관) : 261.9㎡(지상1층~지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,440백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,440	-	18	1,080	2,342
국 비	1,720	-	12	540	1,168
시 도 비	860	-	6	270	584
시군구비	860	-	-	270	590
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○안산도서관 리모델링 실시설계 및 공원조성계획 심의 중

□ 향후계획

○  (`23. 09.~10.) : 건축 인․허가 및 공사 일상감사 및 계약심사 의뢰

○  (`23. 11.~`24. 09.)  : 공사 착·준공 및 도서관 재개관

사업명

대덕구 신청사 건립

담당자

공공청사과 이문용(☎608-5252)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현 청사는 건축물의 노후화로 근무여건이 열악하여 행정수요에 적극 대응이 어려움

○ 효율적인 행정기능 수행과 양질의 행정서비스를 제공하기 위해 신청사 건립이 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2026년

○ 위 치 : 대덕구 연축동 241번지 일원

○ 규 모 : 3동(본청, 의회, 보건소), 지하1/지상6층, 연면적 35,684

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 120,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	120,000	75	92	2,000	117,833
국 비
시 도 비
시군구비	89,300	75	92	2,000	87,133
지 방 채
민간자본
기 타	30,700	0	0	0	30,700

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0.14%)

○ 2013. 02.    : 청사건립기금 조성 및 운용조례 재정계획 수립

○ 2021. 02. 09. : 대덕구청사 건립 타당성조사 및 기본계획수립용역 완료

○ 2021. 10. 22. : 대덕구 신청사 건립 건설공사 기본계획 수립 고시

○ 2022. 03. 02. : 2022년도 제1차 지방재정투자심사부(市 재정계획심의위원회)

○ 2022. 04. 01. : 대덕구 청사 활용 업무협약 체결(대덕구-대전광역시)

○ 2022. 06. 08. : 대덕구 신청사 건립 공공건축 심의(區 건축위원회)

○ 2023. 01. 09. : 대덕구 신청사 건립 기본(계획 및 중간)설계용역 착수

○ 2023. 03. 16. : 대덕구 신청사 건립 감독 권한대행 등 건설사업관리용역 착수

□ 향후계획

○ 2024. 04. 대덕구 신청사 건립 설계 완료

○ 2024. 07. 대덕구 신청사 건립 공사 착수

○ 2026. 12. 대덕구 신청사 건립 공사 준공

10-2. 지방채 발행사업 : 해당없음

10-3. 민간투자사업 : 해당없음