□ 주요 투자사업 추진현황

우리 대덕구에서 ‘23년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

□ - 1 투자심사 대상사업

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후
회덕(장동)~상서간 도로개설사업	8,000	6,314	843	843	-	2024	2020	45
중리근린공원복합 문화센터조성	5,513	3,143	2,370	-	-	2023	2020	100
민관협력 중소벤처 스마트혁신지구 조성사업	10,700	4,021	5,530	949	200	2024	2021	80
신청사 건립	159,800	75	1,331	31,149	127,245	2027	2022	1.39
2023 대덕축제	2,435	-	581	904	950	지속	2023	100
2023 대덕거리 맥주 페스티벌	1,797	794	456	257	290	2025	2023	68
대청호 대덕 뮤직페스티벌	543	276	267	-	-	완료	2022	100
안산도서관 리모델링	5,596	18	324	5,254	-	2024	2023	60
주민자치회 주민총회	464	120	120	104	120	지속	2022	100
회덕다목적 체육센터 건립	7,212	-	103	4,649	2,460	2025	2022	35
중리미래 공영주차장 조성	4,300	-	2	104	4,194	2025	2022	10
오정근린공원 조성	4,000	-	154	3,846	-	2024	2022	20

‣대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여, 2023년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 ‘23년말 기준으로 작성

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

회덕동(장동)~상서간 도로개설사업

담당자

도시계획과 천성관(☎608-5942)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주한미군 공여구역으로 낙후된 주변 지역의 경제를 진흥시켜 지역 간의 균형 있는 발전과 주민의 복리 증진 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2024

○ 위 치 : 대덕구 장동 370-2번지 ~ 상서동 799-6번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=1.08㎞, B=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,000	6,314	843	843
국 비	4,000	2,876	562	562
시 도 비	2,000	1,438	281	281
시군구비	2,000	2,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ ‘21. 10. 12. : 도로개설공사 계약 및 착공(1차분)

○ ‘22. 11. 30. : 2차분 공사 착공

○ ‘24.  4. 26. : 1차분 공사 준공

□ 향후계획

○ ‘24.  8. : 3차분 공사 착공

○ ‘24. 12. : 2,3차분 공사 준공

사업명

중리근린공원 복합문화센터 건립

담당자

공공청사과 권연수(☎608-5193)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활SOC 복합화로 지역 주민의 문화‧평생교육‧문화향유 기회 제공으로        주민 삶의 질 향상 및 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 01. ~ 2023. 06

○ 위 치 : 대덕구 중리동 388-17번지(중리근린공원 내)

○ 규 모 : 연면적 3,098.47㎡ / 지하1층, 지상2층

층별	지하 1층	지상 1층	지상 2층
조성시설	￭ 주 차 장(41면) ￭ 기 계 실	￭ 생활문화센터 ￭ 작은 도서관	￭ 국민체육센터

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,513백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,513	3,143	2,370
국 비	2,016	1,584	432
시 도 비	835	729	106
시군구비	2,662	830	1,832
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019. 10. : 생활SOC 복합화 사업 최종선정

○ 2020. 10. : 중리근린공원 복합문화센터 건립 기본계획 수립

○ 2021. 10. : 설계용역 완료

○ 2021. 12. : 공사 착공

○ 2023. 06. : 공사 준공

○ 2023. 10. : 시설물 이관(평생학습원) 및 준공식 개최

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : 당초)지상3층/1,950㎡ → 변경)지하1층,지상2층/3,098㎡

○ 총사업비(예산액 기준) : 당초)4,032백만원 → 변경)5,870만원

사업명

민관협력 중소벤처 스마트혁신지구 조성사업

담당자

경제과 홍성진(☎6481)

□ 사업목적 및 필요성

○「2021 민관협력 중소벤처 스마트혁신지구 조성사업」(중기부) 공모선정

○ 낙후공업지역의 활성화 및 경쟁력 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2024년(예정)

○ 위 치 : 대덕구 평촌동 142-1

○ 규 모 : 토지 2,413㎡, 건축물 연면적 1,556㎡(2개동)

○ 내 용 : 주지 매입 및 스마트플랫폼 조성(공동활용공간, 인프라, 교육장, 회의실 등)

○ 사업수행 : (재)대덕경제재단

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,700	4,021	5,530	949	200
국 비	4,000	1,334	2,666
시 도 비	5,300	2,631	2,434	235
시군구비	1,400	56	430	714	200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 사업부지(토지 및 건물) 공유재산 취득 완료(`21. 12.)

○ 건축물 석면조사 및 해체·제거(`22. 6.)

○ 공용장비(1차) 입찰 및 계약/대형기계 6종(`22. 11.)

○ 건축물 해체공사 및 경관심의 완료(`23. 2.)

○ 건축설계 용역완료 및 건설사업관리계획 수립(`22. 5.)

○ 공용장비(2차) 입찰 및 계약/연구장비 6종(`23. 6.)

○ 건축공사 착공(`23. 8.)

○ 공장동 준공 및 장비설치 등 인프라조성(`24. 3.)

□ 향후계획

○ 추가 건축비 소요분 예산편성/시, 구비 (`24. 9.~)

○ 본격 운영에 따른 자체 운영비 반영/200백만원 (`25. ~)

사업명

대덕구 신청사 건립

담당자

공공청사과 이문용(☎608-5252)

□ 사업목적 및 필요성

○ 연축지구 내 청사 이전으로 지역균형발전 도모 및 행정서비스의 질적 향상과 구민 편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2027.

○ 위 치 : 대덕구 연축동 241번지 일원 / 대전연축 도시개발사업 내 공공청사 부지

○ 규 모 : 연면적 48,810㎡, 지하2층/지상9층, 3동(본청, 의회, 보건소)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 159,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	159,800	75	1,331	31,149	127,245
국 비
시 도 비
시군구비	159,800	75	1,331	31,149	127,245
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(공사발주 전 행정절차 이행)

○ 설계용역(’23. 01.) 및 건설사업관리용역(’23. 03.) 착수

○ 24년도 제2차 지방재정투자심사 조건부 승인(’24. 06.)

□ 향후계획

○ ’24. 08. : 신청사건립 공사 발주(조달청)

○ ’24. 12. : 공사 시공자 선정 및 착공 / 준공 : ‘27. 06.

□ 사업변경 내역

구 분	당초	변경
총사업비	120,000백만원	159,800백만원
사업규모	연면적 35,684㎡, 지하1층/지상6층	연면적 48,810㎡, 지하2층/지상9층

사업명

2023 대덕축제

담당자

문화관광체육과

현수영(☎ 608-6732)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천혜의 자연 대청호를 배경으로 개최되는 대덕구 대표축제

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 4. 7.(금) ~ 5. 7.(일) / 31일간

○ 위 치 : 대청공원 일원

○ 규 모 : 관광객 약 63만명, 31일의 장기간 축제

○ 내 용 : 경관전시, 프린지 무대 공연, 먹거리부스, 폐막행사 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,435백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,435		581	904	950
국 비
시 도 비	800		300	250	250
시군구비	1,635		281	654	700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 야간경관조성, 전시프로그램 운영, 푸드트럭 먹거리존 운영 등 주민과

함께하는 축제의 장 조성

□ 향후계획

○ 보완사항 개선하여 지속가능한 전국 대표축제로 자리매김 노력

□ 사업변경 내역

○ 2023년도 예산의 경우 대청호대덕뮤직페스티벌(2.6억)과 2023 대덕축제(5.8억)으로 별도 수립하였으나, 2024년도 대덕물빛축제 행사운영비(6.4억)으로 통합하여 수립

○ 향후 예산관리의 효율성을 위해 하나의 편성목으로 예산수립 예정

사업명

2023 대덕거리 맥주페스티벌

담당자

경제과 신동원(☎608-6923)

□ 사업목적 및 필요성

○ 침체된 골목상권의 개발 및 지역상인 만의 참여 독려로 직접적인 매출증대 효과

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 7. ~ 9. / 12회 / 금․토 17:00 ~ 22:00

○ 위 치 : 중리·송촌·비래·신탄진·석봉·목상동 골목상권

○ 규 모 : 뮤지션 공연, 맥주페스티벌, 우산거리 조성, 라디오dj박스 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,797백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	1,797	794	456	257	290
국 비	90	90
시 도 비
시군구비	1,707	704	456	257	290
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 68%)

○ 2023년 대덕거리 맥주페스티벌 취소 / 기상악화 및 수해발생

⇒ 지역별 상권활성화이벤트(버스킹 공연)로 진행

□ 향후계획

○ 2024 대덕거리 맥주페스티벌 추진 / 완료 (‘24. 5월 중)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 상권활성화이벤트 추진 / 수해발생 등에 따른 대덕거리 맥주페스티벌 취소

- 변경 전후 비교

구분	사업명	총사업비	기간	내용	비고
변경전	2023 대덕거리 맥주페스티벌	456	‘23.7~9	· 6개동, 12회 맥주페스티벌 개최
변경후	2023 대덕거리 맥주페스티벌	456	‘23.11~12	· 상권활성화이벤트 -게릴라버스킹공연 -상권홍보방송 프로그램 제작· 송출	과업내용변경

사업명

대청호대덕뮤직페스티벌

담당자

문화관광체육과

현수영(☎ 608-6732)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천혜자연 생태관광지인 대청호에서 자연·사람·음악이 함께하는 힐링의

음악 축제 개최로 지역경제 및 관광 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 4. 8.(토) ~ 4. 9.(일)

○ 위 치 : 대청공원 일원

○ 규 모 : 관람객 약 25만여명 방문

○ 내 용 : 개막식 및 퍼포먼스, 유명가수 공연(10팀) 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 543백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	543	276	267
국 비
시 도 비	15	15
시군구비	528	261	267
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 뮤직페스티벌, 체험부스, 물빛마켓 등 프로그램 추진완료

○ 부서별 연계추진행사 등 추진

□ 향후계획

○ 대덕물빛축제 시 메인프로그램으로 추진

○ 매년 새로운 가수 라인업과 개막퍼포먼스 등으로 전 세대가 즐기는

공연의 장 마련

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 2023년도 예산의 경우 대청호대덕뮤직페스티벌(2.6억)과 2023 대덕축제(5.8억)으로 별도 수립하였으나, 2024년도 대덕물빛축제 행사운영비(6.4억)으로 통합하여 수립

○ 향후 예산관리의 효율성을 위해 하나의 편성목으로 예산수립 예정

사업명

안산도서관 리모델링

담당자

도서관운영과 표진권(☎5562)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후(1994년 개관) 도서관 시설로 주민들의 시설 개선 요구 증가로 쾌적한 독서문화환경조성 및 생활문화 공간 확충 등 역할 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 9. ~ 2024. 9.

○ 위 치 : 대덕구 법동 274-2번지

○ 규 모 : 건축연면적 2,724.57㎡(본관 2,462.67㎡ / 별관 261.9㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,596백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,596	18	324	5,254
국 비	1,720	12	163	1,545
시 도 비	860	6	81	773
시군구비	1,316		11	1,305
지 방 채
민간자본
기 타	1,700		69	1,631

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2023. 12. 안산도서관 리모델링 및 증축 공사 착공

□ 향후계획

○ 2024.  9. 안산도서관 리모델링 및 증축 공사 준공

○ 2024. 11. 안산도서관 재개관 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업비 : (당초) 3,440백만원 → (변경) 5,596백만원 / 증 2,156백만원

○ 사유 : 최근 인건비 및 건축자재비 상승, 건축법에 따른 직통계단 추가 설치로 증축 면적 증가

사업명

회덕다목적체육센터 건립사업

담당자

문화관광체육과

이동준(☎608-6271)

□ 사업목적 및 필요성

○ 체육센터 건립으로 지역민 체력증진과 여가생활 도모 통한 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 12. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 대덕구 읍내동 517-12번지 외 1필지

○ 규 모 : 운동시설 1동, 지하1층~지상4층, 연면적 1,483.97㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,212백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	7,212		103	4,649	2,460
국 비	700			700
시 도 비	1,312		17	1,295
시군구비	4,000			1,540	2,460
지 방 채
민간자본
기 타 (지방소멸대응기금)	1,200		86	1,114

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 2023. 4. : 건축기획 사전검토 및 건축전문위원회 심의

○ 2023. 7. : 기본 및 중간설계 완료

○ 2023. 8. : 실시설계용역 착수

○ 2024. 5. : 개발제한구역 내 행위허가(건축허가)

□ 향후계획

○ 2024. 8. : 사업자 선정 및 착공

○ 2025. 12.: 준공

□ 사업변경 내역(2023. 12. 14.)

○ 총사업비 증액

(단위 : 백만원)

구분	합계	국비	시비	구비	기타 (지방소멸대응기금)
변경전	4,800	700	2,100	800	1,200
변경후	7,212	700	1,312	4,000	1,200

○ 변경사유 : 건설사업관리용역 예산 및 물가상승분 반영

사업명

중리미래 공영주차장 조성

담당자

교통과 정희찬(☎608-5292)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주차장 수급 실태조사 용역을 통해 선정된 우선순위를 반영하여 중리동 주거 밀집 지역 등 주차난 해소를 위한 공영주차장 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 01. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 중리동 363-23번지 일원

○ 규 모 : 공영주차장 입체화(2층/3단, 연면적 2,776㎡, 약100면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,300백만원(시비 1,500, 구비 2,800)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,300		2	104	4,194
국 비
시 도 비	1,500		2	104	1,394
시군구비	2,800				2,800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2024. 06. : 市계약심사 및 區 일상감사 완료

○ 2024. 06. : 건축·기계, 전기, 소방, 통신 등 공사 및 용역 계약의뢰

□ 향후계획

○ 2024. 07. : 건축·기계, 전기, 소방, 통신 등 공사 및 용역 착공

○ 2024. 07. ~ 2025. 06. : 공사 및 용역 추진 및 준공 예정

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

오정근린공원 조성사업

담당자

공원녹지과

김원섭(☎042-608-5112)

□ 사업목적 및 필요성

○ 오정·대화권역의 열악한 공원 환경 개선을 통하여 지역 주민의 생활 수준 향상

○ 미집행 도시공원 조성을 통해 녹색 복지공간 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.

○ 위 치 : 오정동 산17-1일원(오정근린공원)

○ 규 모 : 공원조성 1식(57,548㎡)

○ 내 용 : 무장애산책로, 데크계단, 잔디광장, 다목적광장, 화장실, 놀이시설 설치 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,000		154	3,846
국 비	600		11	589
시 도 비	1,300		25	1,275
시군구비	500		4	4,96
지 방 채
민간자본
기타 (지방소멸대응기금)	1,600		114	1,486

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 약20%)

○ 2024.4.12. 오정근린공원 무장애 도시숲 조성사업 착공

○ 2024.5.20. 오정근린공원 조성사업 착공

□ 향후계획

○ 2024.11.17. : 오정근린공원 무장애 도시숲 조성사업 준공

○ 2024.12.15. : 오정근린공원 조성사업 준공

□ 사업변경 내역

○ 없음

: 해당없음
우리 대덕구에서 ‘23년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

□ - 2 지방채 발행사업

: 해당없음
우리 대덕구에서 ‘23년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.

□ - 3 민간투자사업